문서번호	슬러지재활용과-233
결재일자	2014.3.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
박성철		박명우	03/21 채희정
협조

설 계 변 경 보 고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.03

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

설 계 변 경 보 고

우리쎈터 154kv 변압기 전력케이블공사 감독 업무 수행중 공사 물량 변경되어 정산 처리하고자 함

□ 공 사 현 황

○ 공 사 명 : 154kv 변압기 전력케이블공사

○ 공사기간 : 2013.12.23. ~ 2014.06.10

○ 도 급 액 : 금86,791,480(금팔천육백칠십구만일천사백팔십원)

○ 도 급 자 : ㈜세진종합이엔씨   대 표 이 성 임

□ 보 고 내 용

○ 금번 교체설치 대상인 2호 변압기 3차측(6.6KV) 배선은 BUS DUCT 방식이나

○ 철거 대상 물량은  BUS DUCT 및 고압케이블 철거로  적용되어

○ 고압케이블 철거 물량을 감액 정산 하고자 함

공 종	당 초	변 경
배 선 철 거	6/10KV HFCO 300㎟/1C 207m	6/10KV HFCO 300㎟/1C 0m

□ 변 경 금 액

구 분		당 초	변 경	증/감
도급비	공사원가	78,901,346	75,901,346	3,000,000
	부가가치세	7,890,134	7,590,134	300,000
	계	86,791,480	83,491,480	3,300,000

□ 조 치 의 견

○ 물량 증감 내역을 설계변경 정산처리 하고자 함

첨부 : 1.합의각서 1부

2.변경설계서 1부.  끝.