문서번호	행정지원과-34213
결재일자	2016.12.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	동부수도사업소장
손정훈	서경란	이만기	12/30 홍현구
협 조

관급자재(공기순환기, EHP) 납품기한 연기 보고

2016. 12.

관급자재(공기순환기, EHP) 납품기한 연기 보고

청사 증축 건물에 설치되는 관급자재(공기순환기, EHP) 납품 기한 만료로 인해 그 납품기한을 연기하고자 아래와 같이 보고 드림.

❏ 발 주 현 황

□ 건       명 : 청사 증축 기계설비공사 관급자재 조달구매

- 계 약 자 : 삼성전자㈜

- 계약수량 :

▸공기순환기(공기순환기 외 6종)

▸전기히트펌프(전기히트펌프 외 20종)

- 계약금액 : 금33,569,780원(금삼천삼백오십육만구천칠백팔십원)

❏ 납품기한 연기사유

□ 한파로 인한 작업불가

□ 인력수급부족으로 내․외부 마감공사 지연

❏ 납품기한 변경내용

□ 변경내역

품 명	규 격	수량	납 품 기 한		비고
			당초	변경
A)공기순환기
냉난방공조공사	스파이럴덕트설치, 평균Φ200mm	80	2016.12.30.	2017.1.31.
냉난방공조공사	플렉시블덕트설치, 평균Φ200mm	20	2016.12.30.	〃
냉난방공조공사	덕트보온, 평균Φ200mm	10	2016.12.30.	〃
냉난방공조공사	룸컨트롤러세트및설치	2	2016.12.30.	〃
냉난방공조공사	룸컨트롤러용전선 및 전선관설치	30	2016.12.30.	〃
공기순환기	공기순환기, 한창, AN080FSKLBN1PP, 800㎥/h, 덕트형/폐열회수형	2	2016.12.30.	〃
냉난방공조공사	덕트설치기본, 평균Φ200mm	2	2016.12.30.	〃
B)전기히트펌프			2016.12.30.
냉난방기	히트펌프용실내기, AXD-E24K200A, 분배키트2실	1	2016.12.30.	〃
열펌프	AM100HXVUHH1, 냉방29.0/난방 32.6kW	2	2016.12.30.	〃
냉난방기	AWR-WE11N, 룸컨트롤러	7	2016.12.30.	〃
냉난방기	AR-KH00, 무선룸컨트롤러	1	2016.12.30.	〃
냉난방기	AM023KN1DBH1PP	1	2016.12.30.	〃
냉난방기	AM083KN4DBH1PP	3	2016.12.30.	〃
냉난방기	AM100KN4DBH1PP	3	2016.12.30.	〃
냉난방기	AM023KNDDBH1PP	1	2016.12.30.	〃
냉난방공조공사	냉난방기설치, 기본	8	2016.12.30.	〃
냉난방공조공사	냉매관및설치, 평균Φ12.7mm	102	2016.12.30.	〃
냉난방공조공사	냉매관및설치, 평균Φ15.88mm	84	2016.12.30.	〃
냉난방공조공사	냉매관및설치, 평균Φ20mm	68	2016.12.30.	〃
냉난방공조공사	냉매관및설치, 평균Φ25mm	38	2016.12.30.	〃
냉난방공조공사	룸컨트롤러세트용전선설치 및 전선관설치	180	2016.12.30.	〃
냉난방기	ACM-A202DN, 중앙제어기	1	2016.12.30.	〃
냉난방공조공사	중앙컨트롤러세트용전선 및 전선관설치	120	2016.12.30.	〃
냉난방공조공사	냉난방기용 Y분기관설치	6	2016.12.30.	〃
냉난방공조공사	PVC드레인관설치, Φ32mm	160	2016.12.30.	〃
냉난방공조공사	노출배관커버트레이설치	10	2016.12.30.	〃
열 펌프	받침대,평균990×830×130mm	2	2016.12.30.	〃
냉난방공조공사	공조장치설치용크레인, 25톤	1	2016.12.30.	〃

□ 지체상금 : 미부과

❏ 처 리 의 견

□ 증축 건물 내 냉·난방설비의 납품기한을 연기하여 사업 추진에       만전을 기하고자 함.  끝.