문서번호	교통운영과-21900
결재일자	2015.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	교통개선팀장	교통운영과장	보행친화기획관		도시교통본부장
임홍필	유승효	강진동	김용남		11/10 신용목
협 조
	도로계획과장			최동필
	주무관			조혜진

서울역 주변 교차로 개선공사

추가 소요사업비 확보 조치계획

2015.11

도시교통본부

(교통운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

서울역 주변 교차로 개선공사 추가 소요 사업비 확보 조치계획

서울역고가 폐쇄후 교통영향 및 시민불편을 최소화하기 위한 “서울역 주변 교차로개선공사”시행(도기본 토목부)중에 사업비 추가 확보 요청이 있어 그 방안을 보고 드림

□ 추진경위

○ ‘14.08.27 : 서울역 고가 프로젝트(가칭) 추진계획안 수립(시장 방침)

○ ‘14.09.05 : 서울역 주변 교통체계 개선대책 수립 추진계획(본부장 방침)

○ ‘14.10. ~ ’15.9 : 서울역 주변 종합교통체계 개선대책 수립용역 시행(교통운영과)

○ ‘15.06.25 : 교통안전시설 심의 2개소 가결(염천교교차로, 중림동교차로)

○ ‘15.06.30 : 서울역 주변 교차로 개선사업 시행 요청(교통운영과→도기본 토목부)

○ ‘15.08.07 : 서울역 주변 교차로 개선공사 착수(도기본 토목부)

○ ‘15.10.22 : 예산 추가 확보 요청(도기본 토목부-22056호, 548,650천원)

□ 서울역 주변 교차로 개선공사 개요

○  위    치 : 중구 염천교 교차로 등 5개 교차로

○  규    모 : 서울역 주변 교차로 개선 4개소, 교차로 신설 1개소

- 개 선 : 서울역교차로, 중림동삼거리, 숙대입구교차로, 염천교사거리

- 신 설 : 숭례문삼거리 교차로(가칭)

○  사업기간 : 2015. 8. 7 ~ 2015. 12.31

○  총사업비 : 18억원

○  시행부서 : 도시기반시설본부 토목부, 설비부

□ 추가 소요사업비(도시기반본부)

○ 규모 : 548,650천원(세부내역 첨부)

○ 추가 소요사유

- 교차로 개선공사 시행중 남대문경찰서, 중구 도로시설과, 공원녹지과, 서부도로사업소 등 유관기관의 추가 요청사항 반영

- 추가 요청내역 : 차도부분에 PE방호벽 설치,보도블럭포장 연장,지장수목 원인자부담금 등

□ 사업비 집행 및 부족액 현황

○ 도로교통소통개선사업

- 서울역주변 교차로 개선공사 : 증 548,650천원(1,800,000천원→2,348,650천원)

- 기타지점 사업 : 감 101,510천원(2,250,000천원→2,148,490천원)

- 세부내역                                                 (단위 : 천원)

구분		2015년 예산(A)	기 배정액(B)	집행잔액(C) (A-B)	추가소요액(D)	부족액(D-C)
도로소통 개선사업	계	4,050,000	3,901,350	148,650	548,650	△400,000
	서울역주변 교차로 개선사업	1,800,000	1,752,860	47,140	548,650	△501,510
	기타지점 사업	2,250,000	2,148,490	101,510		101,510

□ 사업예산 변경계획

○ 서울역주변 교차로 개선공사 부족예산 548,650천원은 도로소통개선사업의 집행잔액 148,650천원을 사용하고,

○ 나머지 부족분 400,000천원은 염천교교차로 개선공사의 일환으로 도시기반시설본부 토목부(주관부서:도로계획과)에서 시행한 의주로 지하차도 평면화 예산중 집행잔액으로 사용

- 의주로 지하차도 평면화 예산 사용 : 400,000천원

○ 서울역 주변 5개 교차로 중 염천교 교차로, 중림동 교차로는 현재 공사진행중이고, 서울역고가 폐쇄시기(‘15년 11월)전에 교차로 개선공사를 완료해야 하므로 금년내 부족예산 501,510천원 확보가 불가피한 실정임.

□ 행정사항

○ 예산재배정 : 도로계획과→토목부(의주로 지하차도 평면화 예산 400,000천원)

첨 부 : 사업예산 추가요청 공문(토목부-22056호(2015.10.22.)). 끝.