“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방행정타운 1단계 설계도서 검토의견 조회(최종)

1. 관련근거

가. 소방행정타운 1단계 건립공사 착공 : 2016. 5. 18.

- 11.30. 기준 공정 : 11%(생활관,훈련탑,특구단 1층 골조공사)

나. 소방행정과-23957(2016.9.8.)호 “인명구조견사 위치관련 관리방안 검토결과 보고”

다. (소방학교) 소방행정타운 설계변경시 반영사항 건의(2016.8.10.)

2. 소방행정타운 건립(1단계)공사를 착공하여 골조공사가 진행중인 바, 설계도서 중 보완이 필요한 사항을 조회하니 해당 부서에서는 면밀히 검토 후 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 설계도서 검토의견 수렴(최종)

- 제출일시 : 2016. 12. 14.(수)까지 의견제출

- 검토의견 제출 범위 : 경미한 설계변경, 예산증액 없는 변경

⇨ 설계변경에 따른 공기연장 사안은 미반영

⇨ 1억원 초과 증액 사안은 미반영

⇨ 설계도면 상 표기 또는 구체적으로 명확히 요구

※ 소방학교는 “붙임 3” 내용중 적색문자에 대한 보조자료 제출

- 작성서식 : “붙임 5” 예시 참조

(그간 구두 또는 기타 매체로 논의된 사항도 본 문건으로 제출)

※ 공정 상 추가변경은 불가하니 최종 의견 제출

○ 조치계획(소방행정타운건립추진단)

- 취합내용 검토 : 12.16.

- 설계변경 요청 : 12.21. (소방재난본부 → 도시기반시설본부)

붙임  1. 소방행정타운 건축 설계도서 1부(종이문서 및 별도 송부).

2. 건축 설계도서(pdf파일) 2부.

3. 소방행정타운 건립관련 소방학교 요구사항 검토결과 보고 1부.

4. 인명구조견사 위치관련 검토결과 보고(참고용) 1부.

5. 소방행정타운 1단계 설계도서 최종검토 의견서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시소방학교장(교육지원과장),서울특별시소방학교장(구조구급교육센터장),119특수구조단장(행정지원과장),119특수구조단장(특수구조대장)
★담당자	곽민규		단장	박정경		소방행정과장	12/09 김선영
협조자
시행	소방행정과-32631	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	www.fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1393	/전송	02-3706-1329	/	119mk2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)