투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경(정산) 시행[2016년 도로기전시설물 유지보수공사(연간-북부)

1. 기전과-12502호(2016.12.13.) 「‘16년 도로기전시설물 유지보수공사 설계변경(정산) 검토보고」와 관련하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가-북부)

나. 공사기간 : 2016. 3. 3. ~ 2016. 12. 31.

다. 계약업체 : ㈜신화티앤에스 대표 이용철

라. 공사금액 : 금242,211,760원

마. 설계변경 내역                                    (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
계약금액	242,211,760	265,490,000	23,278,240

바. 설계변경사유

1) 제1차~제8차 작업완료에 따른 계약수량대비 시공물량 증․감 발생

2) 신규 공종 추가에 따른 물량변경 발생

사. 예산과목 : 기전시설물관리, 도로기전시설물일상유지보수, 시설비

붙임 1. 설계변경(1차) 방침서 1부.

2. 설계변경(1차) 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	안종필		기전과장	이영목		북부도로사업소장	12/14 신응수
협조자
시행	기전과-12508	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913(번동,북부도로사업소)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-944-5470	/전송	02-945-5074	/	ajp66@seoul.go.kr	/	대시민공개