함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	수도자재관리센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	디지털수도계량기 무선원격검침단말기 설치용역 연기

1. 수도자재관리센터-4560(‘14.03.20)호와 관련입니다

2. “디지털수도계량기 무선원격검침단말기 설치용역발주”건과 관련하여  아래와 같이 완수(준공)기한을 연기하고자 합니다.

가. 건   명 : 디지털수도계량기 무선원격검침단말기 설치용역발주

나. 계약번호(납품요구번호) : 20131#######00

다. 계약일자 : 2013.12.23

라. 지체상금부과여부 : 미부과(발주청 사유)

마. 완수(준공)기한

변경전	변경후	변경사유
2014.03.24	2014.04.30	디지털계량기의 설치에 따른 공가 세대 다수 및 일부세대 거부 등

붙임 : 1. 검토보고서 1부.

2. 연장동의서 1부.  끝.

주무관	조중엽		계량기관리팀장	조현외		소장	03/21 성시영
협조자	주무관	한상미
시행	수도자재관리센터-4579	(		)	접수		(		)
우	156-812	서울특별시 동작구 노들로 734	/
전화	02-3146-1941	/전송	02-3146-1909	/	aav223@seoul.go.kr	/	대시민공개