투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	재사용플라자 건립공사 건설사업관리단 책임건설사업관리기술자 박영배 귀하
(경유)
제목	재사용플라자 건립공사 실정보고 재검토 및 설계변경 최소화 검토요청

1. PC재사용16-677(2016.12.28)호와 관련입니다.

2. 재사용플라자 건립공사와 관련하여 실정보고(우수PT 방수누락 등 5건)에 대하여 아래와 같이 재검토하시어 발주처 설계변경 요청사항을 2017.01.06까지 우선 보고하여 주시고 설계서의 누락·오류사항은 아래사항을 보완하여 2017.01.13까지 시간지켜 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 실정보고관련 재검토 요청사항

○ 설계서의 누락·오류에 대한 설계자의 의견이 불분명하므로 설계자의 명확한 의견(도면누락, 내역누락, 도면오류의 원인과 설계변경적정여부 등)과 이에 대한 건설사업관리단의 정확한 검토의견.

○ 금번 실정보고에 포함되지 않은 향후공정의 설계서의 누락·오류 등까지 모두 포함하여 일괄 실정보고를 하여 주시고 추가사항에 대하여도 설계자 및 건설사업관리단의 검토의견을 면밀히 검토하여 제출.

○ 설계서의 누락·오류 등에 대하여 시공자 및 건설사업관리단이 착공 후 사전 도면 검토시 발견하지 못하고 당시 실정보고 하지 않은 이유와 금번 공사직전에 보고하게 된 경위제출.

※ 착공시 설계서의 사전검토는 설계오류 등을 사전확인하여 향후 예산 및 공정관리, 설계도서의 수정 등을 일괄적으로 하기 위한 건설사업관리단의 중요한 작업이나 공정직전에 보고하는 경우에는 예산 및 공정관리의 대처가 어렵게 됨.

○ 설계도서대로의 시공에 문제가 발생되는 사안 위주로 설계도서 검토하여 설계변경을 최소화하고 예정공기내 공사완료에 되도록 철저한 공정관리 요청.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김찬유		환경시설과장	유현수		건축부장	01/02 김진용
협조자
시행	건축부-62	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)