문서번호	급수설비과-103
결재일자	2017.1.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비과장	급수부장
권오정		김기상	01/04 이규상
협조

’16년 노후 옥내급수관 교체 실적 보고

2017. 1

급수부(급수설비과)

’16년 노후 옥내급수관 교체 실적 보고

서울시 균형성과관리(BSC)사업과 관련하여 노후 옥내급수관 교체(갱생) 추진실적(’16년)을 다음과 같이 보고 드림

1		추진 실적

○ 교체실적(’16.12월말 기준) : 71,540가구 (목표대비 83.2%)

(단위 : 가구수)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
계 획	86,000	3,000	6,000	11,000	22,000	14,000	11,000	11,000	8,000
실 적	71,540	2,891	2,765	6,067	16,277	14,346	11,975	10,389	6,830
계획대비	(83.2%)	(96%)	(46%)	(56%)	(74%)	(102%)	(109%)	(94%)	(85%)

○ 예산집행 실적(’16.12월말 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
집행목표	44,619	1,638	3,656	6,487	9,954	7,063	5,348	6,162	4,311
집행예산	31,267	1,430	1,455	2,841	6,796	6,669	5,180	4,344	2,552

2		검토 내용

○ 추진실적 검토

- 2016년 목표 86,000가구 대비 교체실적이 71,540가구로 83.2%임

- 목표 미달성 사유

⇒ 사업목표 대폭 확대 (’15년 목표 35,000가구 → ’16년 86,000가구)

‣ ’16년 성산시영 APT 공사비 비리관련으로 인한 장기수선충당금 사용이 엄격해져 사업 위축

‣ 재건축 기간 규제완화(40년 → 30년)에 따른 재건축 기대로 교체 거부

‣ 장기수선충당금 부족 및 사업우선 순위(E/V, 외벽도장) 갈등으로 공사기피

첨부 : 노후 옥내급수관 교체 실적(12월말) 1부.  끝.