문서번호	시설보수과-4387
결재일자	2017.1.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	★관리과장	난지물재생센터소장
송민섭	김재봉	윤석경	01/05 정흥순
협 조

17년도 정밀점검 및 내진성능평가 실시계획

2017. 1

난지물재생센터

(시설보수과)

17년도 정밀점검 및 내진성능평가 실시계획

센터 주요시설물에 대하여 정밀점검 및 내진성능평가용역을     실시하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

1		관련근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 동법 시행령 제6조 (안전점검의 실시)

⇒ 시설물의 기능과 안전을 유지하기 위하여 안전점검을 실시해야 함 (2년/1회)

※ 정밀점검 2015년 실시 【업체명 : (주)제이스코리아】

○ 지진·화산재해대책법 제16조 (기존 시설물의 내진보강 추진)

⇒ 공공건축물 내진보강(내진성능평가 포함) 추진 등 규정

○ 서울시 지진방재 종합계획【서울특별시장방침 제163호, 상황대응과-7575(2016.6.15.)】

⇒ 공공건축물에 대한 내진성능평가 및 내진보강 추진 규정

2		추진계획

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 난지물재생센터 정밀점검 및 내진성능평가 용역

○ 소요예산 : 90,000천원 (난지물재생센터 공통분야 유지보수, 시설비)

- 정밀점검 (64,000천원)

- 내진성능평가 (26,000천원)

※ 기술용역 타당성 심사결과에 따라 발주금액 조정반영(예정)

○ 용역기간 : 2017.2. ~ 2017.6.(착수일로부터 120일간)

○ 용역대상

<정밀점검>

- 센터 1·2처리장, 상암·유입펌프장 토목·건축시설물

· 토목시설물 17개소

· 건축시설물 29개동

※ 난지물재생센터는 시설물의 안전관리에 관한 특별법상 2종 시설물에 해당

【공공하수처리시설(1일 최대처리용량 500톤 이상)】

<내진성능평가>

- 평가대상 시설물

대 상	위 치	연면적(㎡)	준공년도	건물구조
난지물재생센터 본관동	난지물재생센터 내	4,481.7	1990	철근콘크리트조
난지물재생센터 관사2동	서울시 강서구 양천로 177	2,214	1993	철근콘크리트조
난지물재생센터 관사4동		2,158	1995	철근콘크리트조

□ 발주계획

○ 정밀점검 및 내진성능평가 통합발주

- 사유 : 분리발주 시 안전점검이 중복되므로 통합발주하여 예산절감

(절감액 : 약 6,000천원)

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

○ 입찰참가자격

- 「시설물의 안전관리에 관한 특별법 제9조」에 의거 안전진단전문기관(종합분야)으로 등록된 업체

-  입찰 참가자는 주된 영업소재지가 서울특별시에 소재한 업체이어야 함

□ 세부 추진계획

○ 용역 추진과정

착수계 제출

(계약일로부터 7일내)

->

중간보고회, 최종보고회 개최

(중간보고회 2회이상, 최종보고회 1회 )

->

최종성과품 제출

(과업종료 10일 전)

○ 정밀점검 시기 및 방법

- 실시시기 : 2017년 실시 (2015년 기시행)

- 점검방법 : 육안점검 및 간단한 측정기구에 의한 점검

○ 내진성능평가 내용

- 자료검토 : 외관조사망 도면 등 각종 자료검토

- 외관(육안)조사 및 비파괴검사 : 부재실측, 콘크리트상태조사 등

- 내진해석 : 시설물 구조해석 및 계산을 통한 평가

○ 조치계획

- 정밀점검 결과

· 중대결함 발견시 정밀안전진단 추가 시행 후 조치

· 지적사항은 시설및건축물 유지보수 단가계약에 의거 단계적으로    조치

- 내진성능평가 결과 지적사항에 대해 내진보강공사(별도예산 확보) 시행

3		향후 추진계획

○ 2017. 1월 : 기술용역 타당성 심사(기술심사담당관)

○ 2017. 2월 : 용역발주 및 계약

○ 2017. 2월 ~ 5월 : 용역시행

○ 2017. 6월 : 용역 준공

붙임 : 1. 정밀점검 대상시설현황 1부.

2. 정밀점검 및 내진성능평가용역 설계내역서 1부. 끝.