투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	우성3차아파트 주택재건축정비사업조합 조합장 허창화 귀하
(경유)
제목	교통안전시설 설치 원인자공사 변경승인 알림 [서초 우성3차아파트 주택재건축공사 현장 교통신호기 설치공사(신호)]

1. 우성3차아파트 주택재건축정비사업조합 우3-1701-442(2016.1.05)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 교통신호기 설치 원인자공사 공사기간 변경승인 요청사항에 대하여 아래와 같이 변경승인하오니 공사시행 및 감리업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서초 우성3차아파트 주택재건축공사 현장 교통신호기 설치공사

나. 변경사항 : 공사기간 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	2016.11.16. ∼2016.12.23	2016.11.16. ∼2017.2.28

다. 연기사유 : 서울시 신호운영실과 KT측 통신장애 발생.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	김용문		관리단속과장	01/06 송재우
협조자
시행	기전과-90	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145	/
전화	02)3284-5432	/전송	02)832-5470	/		/	대시민공개