문서번호	도시철도설비부-285
결재일자	2017.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시철도설비부장
고명규		01/06 정찬웅
협조	시설전기과장		서태창
	전문관		조대근

『신림선 경전철 민간투자사업』

전기분야 총사업비 변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 01

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

『신림선 경전철 민간투자사업』

전기분야 총사업비 변경 검토 보고

우리시 건설기술심의 등 인・허가기관 심의결과를 반영한 신림선 전기분야 공사범위 변경사항에 대한 총사업비 변경여부를 검토하고 결과를 보고 드림.

사업개요

○ 사 업 명 : 신림선 경전철 민간투자사업

○ 공사기간 : 착공일로부터 60개월

○ 시설규모 : 총연장 7.760km, 정거장 11개소, 차량기지 1개소

○ 총사업비 : 4,464억원(`07.7.1 불변가격 기준)

- 설비분야 공사비

(단위 : 억원)

계	전 기	검 수	기 계	통 신	신 호	비 고
1,474.3	463.95	38.66	398.24	255.55	317.9	협상가

총사업비 변경 근거

○ 신림선 경전철 민간투자사업 실시협약 제13조 제1항

검토내용

구 분		변 경 내 용
인・허가기관 요 구	도시공원위원회 심의	보라매공원 개착 최소화에 따른 전차선 자재 및 배관, 배선 증가
	건설기술심의	104변전소 삭제
	실시설계 VE	정거장 콘센트 변경(일반 콘센트 ⇒ 대기전력 차단 콘센트)
		정거장 광고판과 행사안내표지판 조명제어 변경(수동 ⇒ 자동)
		정거장 전기실 상시부하 차단기 변경(ATS ⇒ ATCB)
주무관청 요 구	도시철도설비부	변전소 에너지저장장치 수량 감소(4대 ⇒ 2대)
		송변전용 특고압 케이블 변경(일반 ⇒ 컬러)
		변전소(4개소) 냉방설비 추가
		종합관제동 전기실 발전기 삭제
		전기실(4개소) 변전소용 정류기반 이중화 구성

검토결과

○ 인․허가기관 요구 : 총사업비 변경 대상(실시협약 제13조 제1항 4호)

※ 환경영향평가, 교통영향분석・개선대책 및 인・허가기관의 요구, 지방자치단체와

협의결과 기타 민원의 내용 중 주무관청이 인정하여 총사업비가 증감되는 경우

○ 주무관청 요구 : 총사업비 변경 대상(실시협약 제13조 제1항 5호)

※ 공사범위 변경 등 기타 주무관청의 요구로 인하여 총사업비가 증감되는 경우

○ 사업비 증・감내역

(단위 : 천원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증․감
합 계		8,100,257	7,368,391	- 731,866
인・허가기관 요구	계	4,120,137	3,636,008	- 484,129
	도시공원위원회 심의	0	200,267	200,267
	건설기술심의	3,933,369	3,258,681	- 674,688
	실시설계 VE	186,768	177,060	- 9,709
주무관청 요구	도시철도설비부	3,980,120	3,732,383	- 247,737

조치의견

○ 전기분야 총사업비 변경 금액은 실시협약(제13조 제7항)에 따라

실시계획의 산출내역서를 기준으로 변경 공사비를 산정하여 감리자의

확인을 거쳐 확정하고,

○ 실시협약(제13조 제8항)에 따라 타분야 변경 총사업비와 통합하여

건설보조금으로 지급하거나, 운임조정 또는 운영기간을 조정하여

처리코자 함.

붙  임 : 신림선 전기분야 총사업비 변경 세부내역 1부.  끝.