문서번호	공원녹지과-336		★주무관		자연생태팀장		공원녹지과장		도시관리국장
			장재원		임상호		윤봉섭		01/06 이기배
결재일자	2017.1.6.
공개여부	대시민공개
			협 조

2017년 근교산 등산로 정비사업 추진계획

도시관리국

(공원녹지과)

2017년 근교산 등산로 정비사업 추진계획

태풍 및 과밀이용 등으로 훼손된 등산로를 체계적으로 정비함으로써 산림훼손을 방지하고 쾌적하고 안전한 등산 이용환경을 조성하여 주민 만족도를 제고코자 함

Ⅰ		추 진 근 거

자연생태과-217(2017.01.04)호 「2017년 근교산 등산로 정비사업 추진계획」

Ⅱ		사 업 개 요

위    치 : 고구려정길, 해맞이길, 팔각정길, 아차산 둘레길 등

기    간 : 2017. 1. ~ 7.

규    모 : 약 2.9km

총사업비 : 300백만원(국비 50백만원 / 시비 250백만원)

내    용

훼손 등산로 노면정비, 계단 및 휀스설치

구 분	노 선 명	규모 (km)	사 업 비 (백만원)	사업내용	비 고
1	고구려정길 해맞이길	1.4	100	노후 시설물 교체 및 침식방지 시설 등	국비 50, 시비 50
2	팔각정길	0.9	100	노후 목재휀스 및 계단 교체 등	시비 (의원발의)
3	아차산둘레길	0.6	100	둘레길 진입로 정비 및 안내체계 개선 등	시비 (주민참여예산)

노후 시설물 교체 및 수목식재, 안내체계 개선 등

Ⅲ		세부추진계획

실시설계

서울시 기술용역타당성 심사결과를 토대로 서울시에 설계비 재배정 요구

설계기간 : 2017. 1. ~ 3.

설계기준

□ 산림청 등산로 정비 매뉴얼 준수

□ 도시공원 안내체계 매뉴얼, 목책 제작 설치 가이드라인 적용

□ 토사유실 우려지역, 노후 시설물 등 등산객 안전 위험시설 우선 정비

설계심의

요청시기 : 공정률 70% 시

심의부서 : 서울시 자연생태과

제출서류 : 설계심의요구서, PPT, 설계도서 등

심의결과 : 심의내용에 따라 설계 반영하고 조치결과 제출

시설공사

여름철 우기 등 안전대비 및 경제활성화를 위하여 공사 조기 발주

공사착공 전 현수막 부착 및 주민홍보를 통해 공사시행에 따른 등산객 불편 최소화

Ⅳ		향후 추진일정(안)

2017. 1. ~ 2. : 현장조사 및 실시설계용역 시행

2017. 3. ~ 4. : 서울시 설계심의, 일상감사 등 행정절차 이행 및 공사발주

2017. 5. ~ 7. : 공사시행 및 완료

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.