문서번호	물재생시설과-4948
결재일자	2015.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		물재생시설팀장	물재생시설과장
이창하		이웅희	12/14 이철해
협조
	전문관		양해선

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 기본 및 실시

설계 용역 기성준공(1차) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12

물순환안전국

(물재생시설과)

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 기본 및 실시

설계 용역 기성준공(1차) 보고

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 기본 및 실시설계 용역의    기성준공(1차) 분에 대하여 기성준공 처리 하고자 합니다

Ⅰ		용역 개요

○ 용 역 명 : “중랑”,“탄천”물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 기본 및 실시설계

○ 용역기간 : ’15. 7. 9 ~ ’16.12.29(540일)

- 기본설계(300일), 실시설계(240일)

○ 용 역 비 : 중랑 16.4억원, 탄천 11.9억원

○ 용역업체 :

- 중 랑 : (주)도화엔지니어링외 3

- 탄 천 : (주)한국종합기술외 2

○ 주요 과업내용

- 상위 및 관련계획 검토

- 3차(총인) 처리시설설치 최적 공법선정

- 세부도면 작성 및 년차별 투자계획 수립 등

Ⅱ		기성준공 (1차)현황

□ 기성수행내용

◌ 현장조사

- 유량 및 수질조사(가을, 겨울)

- 중랑물재생센터 현장조사 및 관련부서 업무회의

◌ 기초자료조사 및 관련계획 검토 등

- 과업수행계획서 작성 및 제출

- 기초자료 및 운영자료 수집

- 기본계획 및 관련계획 검토

◌ 자문회의

- 착수보고 및 자문회의 각1회

․시설 및 운영현황, 3차(총인)처리시설계획 중점검토사항, 공법선정계획등

․3,4처리장 운영현황/문제점검토 및 개선방안

․3차(총인)처리시설계획 : 3차(총인)처리시설 공정구성방안, 시설용량검토, 유입수질(부하별) 및 보증수질

- 3차(총인)처리시설 기술공모 : 참가자격 및 기술공모주요내용 검토 , 평가방안 및 평가기준 검토 등

◌ 총인처리시설 견학(2015. 09.02 - 09. 04)

- 서부 공공하수처리시설(대구광역시) 외 6개 하수처리시설 현장조사

- 견학 및 현장조사를 통한 설계반영사항 검토

- 기존 총인처리시설 운영현황조사 및 문제점 검토

- 운영자 면담을 통한 노하우 및 설계시 주요 고려사항 제시등

◌ 총인처리시설 기본계획 검토

- 중랑 3,4처리장 총인처리시설 공정구성방안 검토

- 3차(총인)처리시설 예정부지 및 3,4처리장 수리계획 검토

- 총인처리시설용량, 유입수질 및 보증수질검토

- 일차침전지 및 생물반응조내 응집제 주입시 총인처리 효율검토 등

◌ 3차(총인)처리공법 선정 기술제안 공모

- 기술제안서 공고문, 작성지침 및 평가기준 작성

□ 금회 기성금액

◌ 계 약 금 액(1차 계약) : 750백만원

◌ 기성부분액 : 450백만원

◌ 기  성  율 : 60.0%

□ 기성부분 산출내역

계약 금액 (천원)	선금		기 성						잔액
			①금회신청		②선금공제		③수령예정액 (①-②)
	금액 (천원)	비율 (%)	금액 (천원)	비율 (%)	금액 (천원)	비율 (%)	금액 (천원)	비율 (%)	금액 (천원)	비율 (%)
750,000	375,000	50.0	450,000	60.0	225,000	30.0	225,000	30.0	150,000	20.0

참고1) 선금공제 100%

참고2) 기성율 산정

· 총 공정율 : 57.3% (2016.4 기준)

· 금회 기성 공정율 : 35.6% (2015.12 기준)

· 1차분 기준, 금회 기성 공정율 : 62.1%

□ 세부내역

Ⅲ		보고자 의견

◌ 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 1차 계약의 1차 기성부분이 과업내역에 의거 차질없이 이행되어 기성 준공(1차)처리 하고자함

- 기성(1차) 금액(선금제외 수령예정액) : 225백만원(이억이천오백만원정)

- 예산과목 : 물재생시설 개선 및 관리, 물재생시설 개선, 물재생센터 3차(총인)처리시설 설치, 시설비(설계비)

- 준공 검사원 지정 : 시설5 이웅희, 시설6 양해선

붙임 : 기성총괄내역서 및 성과품 사진철 1부. 끝.