서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 준공기한 연기의뢰

1. 보행정책과-866(2016.7.20.)호와 관련입니다.

2. 『부도심권(대표보행거리)선정 기본설계, 도심권(퇴계로)도로공간재편 기본 및 실시설계용역』과 관련하여 퇴계로 주변사업과의 연계 검토사항 발생으로 준공기한 연기를 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 용 역 명 : 부도심권(대표보행거리)선정 기본설계,

도심권(퇴계로)도로공간재편 기본 및 실시설계 용역

나. 계약업체 : ㈜서우티이씨 대표 강대신

다. 계약금액 : 금일억육천사백구십구만오천원정(￦164,995,000-)

라. 준공기한

- 당초 : 2016.7.31

- 변경 : 2016.9.30

마. 연기사유

- 서울지방경찰청 교통시설안전심의 일정이 당초 7월에서 8월로 연기되어 심의결과에 따른 설계내용 반영과 공사중 교통처리대책 심의 등 후속일정 및 상황 등을 고려한 최적의 설계를 위한 설계기간 연기 필요

바. 귀책소재 : 서울특별시

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 준공기한 연기 방침서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	보행정책과장
★주무관	전하현		보행시설팀장	박찬규		보행정책과장	07/20 이방일
협조자
시행	보행정책과-872	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서울시청 서소문별관 1동6층 보행정책과	/
전화	02-2133-2437	/전송	02-2133-1052	/	jhh1331@seoul.go.kr	/	부분공개(5)