문서번호	도시철도토목부-16592
결재일자	2016.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		토목1과장	도시철도토목부장
엄상민		윤방식	12/30 김진팔
협 조
	주무관			김용선

『지하철9호선 3단계 922공구 건설공사』

사전 공사 추진계획 검토 보고

2016. 12

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

『지하철9호선 3단계 922공구 건설공사』

사전공사 추진계획 검토 보고

『지하철9호선 3단계 922공구 건설공사』와 관련 ‘17년 사전공사 승인 요청에 대해 책임감리원으로부터 실정보고가 있어 이에 대한 검토 보고임. ※ ㈜선진엔지니어링 종합건축사사무소 지감922-16-579호(‘16.12.26)

1		사업 개요

○ 공 사 명 : 지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사

○ 공사개요 : 연장1,470m

(터널 1,238m, 개착 67m, 정거장 1개소 165m)

○ 공 사 비 : 132,933백만원

○ 공사기간 : ‘10. 09. 16 ~ ’18. 12. 31

○ 시공회사 : ㈜대우건설 외 4개사

○ 감 리 사 : ㈜선진엔지니어링종합건축사사무소 외 2개사

2		차수별 발주 현황

(단위 : 백만원)

구분	계	기발주			장래	비 고
		소 계	1~6차	7차
계약금액	132.933	107.698	94.258	13.440	25.235
기성금액	107.698 (81.0%)	107.698	94.258	13.440	-
잔여금액	25,235 (19.0%)	-	-	-	25.235

3		보고 내용

○ 사전공사 내용

위 치	공사내용	비 고
937정거장	- 복공 철거 및 되메우기 - 상수관 복구공 - #2출입구 및 자전거주차장 철근 및 거푸집 설치 - 정거장 환기구 #3~#4철근 및 거푸집 설치
본선환기구	- 환기닥트 철근조립 및 거푸집 설치 (937S1E1)

○ 사전공사 사유

- ‘16년 7차분 공사가 완료됨에 따라 공사의 연속성 확보, 효율적 인력관리 등을 위하여 8차공사 계약시까지 선공사 시행으로 공사추진.

4		감리단 검토의견

○ 지하철공사는 계속공사로 공사의 연속성, 효율적 인력 및 자재, 장비와 현장 관리 측면(전력사용, 양수, 계측 등)에서 연속성 유지가 필요함.

○ 시공사 의견과 같이 향후 발주분인 8차공사 공종중 전체 공정에 부합되도록 승인함이 타당함.

5		조치 계획

○ 책임감리원 검토의견과 같이 ‘17년 예산에 대한 사전공사에 대해 승인코자하며,

○ 사전 공사 추진에 따른 시공, 품질 및 안전관리에 만전을 기하도록 하고, 상기 선시공 공종에 대해서는 8차공사에 반영토록 조치코자 함.

붙임 : 감리검토 의견서 및 관련 자료 1부.  끝.