문서번호	도시철도토목부-16591
결재일자	2016.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		토목1과장	도시철도토목부장
엄상민		윤방식	12/30 김진팔
협 조
	주무관			김용선

『지하철9호선 3단계 923공구 건설공사』

사전공사 승인요청 검토 보고

2016. 12

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

『지하철9호선 3단계 923공구 건설공사』

사전공사 승인 요청 검토 보고

『지하철9호선 3단계 923공구 건설공사』와 관련 ‘17년 사전공사 승인 요청에 대해 책임감리원으로부터 실정보고가 있어 이에 대한 검토 보고임. ※ ㈜동명기술공단 동기공 제2016-362호(‘16.12.29)

1		사업 개요

○ 공 사 명 : 지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사

○ 공사개요 : 연장1,782m

(본선 1,168m, 터널 410m, 정거장 1개소 204m)

○ 공 사 비 : 101,836백만원

○ 공사기간 : ‘10. 09. 20 ~ ’18. 12. 31

○ 시공회사 : 대림산업(주) 외 5개사

○ 감 리 사 : ㈜동명기술공단종합건축사사무소 외 3개사

2		차수별 발주 현황

(단위 : 백만원)

구분	도급비	‘11년 (1차)	‘12년 (2차)	‘13년 (3차)	‘14년 (4차)	‘14년 (5차)	‘15년 (6차)	‘16년 (7차)	‘17년 (8차)	장래
배정금액	101,836	7,668	6,668	17,810	20,705	5,837	10,460	8,042	20,279	4,367
당해공정율	-	7.8%	6.5%	17.4%	20.3%	5.7%	10.2%	7.8%	19.9%	4.4%
누계공정율	-	7.8%	14.3%	31.7%	52.0%	57.7%	67.9%	75.7%	95.6%	100%

3		보고 내용

○ 사전공사 내용

위 치		공 사 내 용	비 고
토 목	938정거장	· 복공 철거 및 되메우기 · 하수관 복구공 · #1, #2출입구 철근조립 및 거푸집 설치 · 보훈병원 옹벽 철근조립 및 거푸집 설치
	본선환기구	· 환기덕트 철근조립 및 거푸집 설치(938E1) · 지하1층 벽체 /방수 / 되메우기(938S1)
건 축	938정거장	· 대합실 및 기능실 벽체 미장 · 화장실 벽체 블록쌓기 · 대합실 벽체 판넬설치
전 기	938정거장	· 전력간선 노출배관공사 · 전등전열설비 노출배관 / 배선공사 · 전기실 판넬 수배전반 설치
기 계	938정거장	· 공조실 덕트설치 · 공조기계실 #1,2 공조덕트 배관 · 냉각탑 설치
소 방	938정거장	· 자탐설비 배관설비 / 배선공사 · 유도등설비 배관배선 · 물탱크실 소화배관

○ 공정 계획

구 간		공 종	‘17. 1월						‘17. 2월
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	28
토목	938 정거장	복공철거 및 되메우기
		하수관 복구공
		#1, 2출입구 구조물공
		보훈병원 옹벽 구조물공
	본선 환기구	환기덕트 구조물공(938E1)
		본체 구조물공(938S1)
건축	938 정거장	대합실 및 기능실 벽체 미장
		화장실 벽체 블록쌓기
		대합실 벽체 판넬설치
전기	938 정거장	전력간선 노출배관공사
		전등전열설비 배관/배선
		전기실 판넬 수배전반 설치
기계	938 정거장	공조실 덕트설치
		공조실 #1,2 공조덕트 배관
		냉각탑 설치
소방	938 정거장	자탐설비 배관/배선공사
		유도등설비 배관/ 배선
		물탱크실 소화배관

○ 사전 공사 사유

- ‘16년 7차분 공사가 완료됨에 따라 공사의 연속성 확보 및 효율적인 인원관리를 위해 8차공사 계약시까지 선공사 시행 추진

4		감리단 검토의견

○『서울지하철 9호선3단계 923공구 건설공사』중 시공사가 요청한 사전공사에 대하여 검토한 결과

○ ‘16년도에 7차분 공사가 완료됨에 따라 공사의 연속성 확보 및 효율적인 인원관리를 위해 사전공사를 시행함이 적정한 것으로 판단됨.

5		조치 계획

○ 책임감리원 검토의견과 같이 ‘17년 예산에 대한 사전공사에 대해 승인코자하며,

○ 사전 공사 추진에 따른 시공, 품질 및 안전관리에 만전을 기하도록 하고, 상기 선시공 공종에 대해서는 8차공사에 반영토록 조치코자 함.

붙임 : 감리검토 의견서 및 관련 자료 1부.  끝.