함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	감리용역 변경계약(동부수도사업소 청사 증축공사 감리용역)

우리 사업소에서 시행 중인『청사 증축 공사감리용역』과 관련하여     아래와 같이 변경계약을 하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 동부수도사업소 청사 증축 공사 감리 용역

나. 계약업체 : **********************

다. 계약금액 : 15,636,000원(금일천오백육십삼만육천원정)

라. 준공기한 연기

- 당 초 : 2016. 5. 20. ~ 2016. 12. 30.

- 변 경 : 2016. 5. 20. ~ 2016. 1. 31.

마. 귀책소재 : 동부수도사업소

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

사. 연기사유 : 공사 지연으로 인한 계약 연장

붙 임 : 1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 합의서 및 관련공문 각 1부.  끝.

주무관	손정훈		행정관리팀장	서경란		행정지원과장	12/30 이만기
협조자
시행	행정지원과-34158	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02)3146-2617	/전송	02)3146-2678	/	20160125391@seoul.go.kr	/	부분공개(6)