함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(2016년 북부관내 건설폐기물 처리용역 (장기계속단가계약)- 1회)

1. 서울시시설관리공단 공사감독2처-18813호(2016.12.29) 설계변경 승인요청, 설계변경심의회 개최결과와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 서울시시설관리공단에 감독을 위탁하여 시행 중인 “2016년 북부관내 건설폐기물 처리용역(장기계속계약)”에 대하여 2차 기성 시행코자 물량 산정한 바 계약물량 공종별로 증,감이 발생되어 아래와 같이 설계변경(1차) 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 북부관내 건설폐기물 처리용역(장기계속단가계약)

나. 도 급 자 : (유)도성개발, 대표 윤 칠 중

다. 계약기간 : 2016.5.2. ~ 2016.12.31.(총부기기간 : 2016.5.2 ~ 2017.12.31.)

라. 계약금액 변경

(단위:원)

구 분	당초금액	변경금액	증감액
총부기금액	***********	***********	*
금차(1차)금액	***********	***********	************
2차금액	**********	**********	************

마. 설계변경 사유 : 공종별 용역물량 증,감 발생

바. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후배급수관정비)

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비(전식방지공사)

따로붙임 : 1) 변경설계 내역서(총차, 1차) 각 1부

2) 설계변경사유서 및 설계변경 심의결과 관련서류 각 1부

3) 서울시시설관리공단 설계변경 승인요청 및 관련공문서류 각 1부.

4) 합의서 1부.  끝.

주무관	이준규		주무관	최용진		급수운영과장	이계환		북부수도사업소장	12/30 박철규
협조자	주무관	김정은		주무관	한경란		계약2팀장	양주춘
시행	급수운영과-29400	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3356	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(5)