	서울시립미술관
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 체결보고(서울시립경희궁미술관 철거공사)

총무과-16181(2016.12.30)호와 관련하여 아래 공사건에 대하여 다음과 같이 변경계약 체결되었음을 보고드립니다.

□ 변경계약 체결내역

계 약 업 체			계약금액	준공기한		비 고
상 호	대표자	주 소		당 초	변경후
㈜창의건설	임정택	서울시 성북구 보문로38길 11	변경없음	2016.12.30	2017.03.15	기초구조물 추가물량 발견 및 문화재위원 현장자문 조건부여에 따른 기간연장

따로붙임 : 변경계약서 1부. 끝.

주무관	최현희		총무과장	01/02 황차호
협조자	주무관	김현철
시행	총무과-12	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 61	/	http://sema.seoul.go.kr
전화	02-2124-8814	/전송	02-2124-8830	/	0922chh@seoul.go.kr	/	부분공개(5)