“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(세곡2지구 보금자리주택지구 조성 교통신호기공사 감리용역)

우리 부서에서 추진중인 용역사업에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 세곡2지구 보금자리주택지구 조성 교통신호기공사 감리용역

나. 계 약 자 : 대영유비텍(주) (대표 조근환)

다. 계약금액 : 금95,212,000원

라. 계약기간 : 2013.09.09.~2017.01.15.

마. 준공기한 연기 내역

- 당 초 : 2017. 01. 15.

- 변 경 : 2017. 04. 30.

바. 연기사유 귀책소재 : 서울주택도시공사

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

아. 준공기한 연기사유 : 선행 공정(토목) 지연

붙임 : 1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 방침서 1부.  끝.

	교통운영과장
★주무관	임정규		신호시설팀장	구봉서		교통운영과장	01/03 강진동
협조자
시행	교통운영과-101	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문청사 1동 6층	/
전화	02-2133-2484	/전송	02-2133-1053	/	jglim229@seoul.go.kr	/	대시민공개