문서번호	공공재생과-157
결재일자	2017.1.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		특화공간조성팀장	공공재생과장
김방용		안중욱	01/04 代김장성
협조

- 문화재 정밀발굴조사 용역 - 용역중지 검토보고

[ 남산 예장자락 재생사업  ]

2017. 1.

공공재생과

문화재 정밀발굴조사 용역중지 검토보고

[ 남산 예장자락 재생사업  ]

「남산 예장자락 재생사업 문화재 정밀발굴조사」 추진과 관련하여 동절기 용역중지 요청이 있어 관련내용을 검토보고 함

□ 사업개요

○ 용 역 명 : 남산 예장자락 재생사업 문화재 정밀발굴조사

○ 용 역 사 : 재단법인 기호문화재연구원

○ 계약금액 : 230,153,000원(금이억삼천일십오만삼천원)

○ 계약기간 : 2017. 1. 3. ~ 2017. 3. 13(70일)

□ 요청사항

○ 내    용 : 동절기 용역중지 요청

○ 사    유

- 문화재청과의 행정처리(발굴조사 허가) 기간 필요

- 동절기 토양 결빙에 따른 유구 훼손 가능성

□ 검토내용

○ 동절기 발굴조사는 동토로 표토제거가 어렵고 토양 결빙으로 인한 유구 훼손 가능성도 있으므로 해빙기까지 중지함이 타당

□ 향후계획

○ ‘17. 1. 04. : 용역중지 및 발굴조사 준비철저 통보

○ ‘17. 2. 20. : 정밀발굴조사 재착수

붙임 : 관련문서 1부. 끝.