투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재(UPS) 납품기한 연기 요청(성동소방서 신축공사)

우리 본부에서 시행 중인『성동소방서 신축공사』에 소요되는 관급자재(무정전전원장치)에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 요청 내용

구 분	계약번호 (납품요구번호)	계약자	계약금액 (원)	납품기한		비 고
				당 초	변 경
무정전 전원장치	00157007900 (12-16-2-12294-00)	이화전기공업㈜	29,629,000	2017.01.24.	2017.05.24.

2. 연기사유 : 관급자재 사용시기 미도래에 따른 납품기한 연기

3. 계약금액 및 수량 : 변경없음

4. 제체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 1. 납품기한 연기 검토보고서 1부.

2. 합의각서 1부.   끝.

	설비부장
주무관	유영선		시책사업과장	임현근		설비부장	01/04 권오식
협조자
시행	설비부-158	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8650	/전송	02)3708-8659	/	ysy12290@seoul.go.kr	/	대시민공개