문서번호	원수관리과-33
결재일자	2017.1.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
지방공업사무관대우		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정번석		손주옥	01/04 임철수
협 조
	주무관			하수용

장외영향평가서 및 위해관리계획서 작성 용역 예산 사고이월 보고

2017. 1.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

장외영향평가서 및 위해관리계획서 작성 용역 예산 사고이월 보고

「장외영향평가서 및 위해관리계획서 작성 용역」과 관련하여, 환경부 승인검토 및 현장실사를 위한 일정 소요로, ’16년 지출이 어려움에 따라 사고이월하고자 함

Ⅰ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 장외영향평가서 및 위해관리계획서 작성 용역

□ 용역기간 : 2016. 9. 7. ~ 2017. 2. 15.

□ 용역업체 : 한국산업안전관리원(주) 이상용

□ 계약금액 : 33,000,000원

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,원수및취수비,수선유지교체비,기타교체비

Ⅱ		추 진 경 과

□ 용역계약 체결                                      : ’16. 9. 7.

□ 착수보고회 개최                                    : ’16. 9. 20.

□ 장외영향평가서 심사본 제출 (검토요청)              : ’16.12. 16.

○ 장외영향평가서 제출(강북아리수정수센터 ⇒ 화학물질안전원)

○ 화학물질안전원에서 현재 심사중

□ 위해관리계획서 심사본 제출 (검토요청)              : ’16.12. 16.

○ 위해관리계획서 제출(강북아리수정수센터 ⇒ 화학물질안전원)

○ 화학물질안전원에서 현재 심사중

□ 잔여 공종

○ 장외영향평가서 및 위해관리계획서에 의거 화학물질안전원에서

현장 실사 심사

Ⅲ		사고이월 사유

□ 사 유

○ 장외영향평가서 및 위해관리계획서를 작성․제출(’16.12.16.)된 상태로 현재 화학물질안전원에서 심사 중으로, 현장 실사심사를 필하기 위한 일정이 소요되며,

○ 용역 계약기간이 2016.09.07.~2017.02.15.으로 절대용역기간 부족

Ⅳ		향 후 계 획

□ 2016 회계년도 세출예산 이월 대상사업 제출(행정관리과)

붙임	1. 이월사업별 명세서 1부

2. 사고이월요구서 1부.  끝.