문서번호	한양도성도감-135
결재일자	2017.1.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	도성보존팀장	한양도성도감과장	문화본부장
구선이	신추교	심말숙	01/04 고홍석
협 조

한양도성 숙정문 보수공사 설계용역 완료보고

2017. 1.

문 화 본 부

(한양도성도감)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

한양도성 숙정문 보수공사 설계용역 완료보고

한양도성 숙정문의 보수공사를 위한 설계용역을 완료하고 아래와

같이 보고 드림.

Ⅰ				용역개요
					ㅊㅊ	ㅊ

□ 용 역 명 : 한양도성 숙정문 보수공사 설계용역

□ 용역기간 : 2016. 09. 19. ~ 12. 17.(90일)

□ 사 업 자 : ㈜볕터건축사사무소(대표:황진하)

□ 계약금액 : 금30,946,900원(전액국비)

<문화재청 설계승인>

◎ 승 인 일 : 2016. 12. 20.

◎ 승인조건 : 조건부 승인

◎ 보완사항

- 공사 시행시 기술지도단을 구성하여 주요공정을 자문 받아 사업시행

- 기둥은 습기에 강한 느티나무 등으로 수종 변경

- 마루는 해체후 고증조사, 기술지도 자문을 받아 구조를 재검토

※ 문화재청 긴급보수비를 교부받아 시행한 사업으로 설계승인 검토 대상사업임

Ⅱ				설계내용(보수내용)
					ㅊㅊ	ㅊ

□ 예정공사비 : 금350,000,000원

□ 설계내용 : 숙정문 초석 상부 해체 보수(문루 전체)

․가설공사 : 강관 쌍줄비계, 강관 덧집 설치

․목공사

- 기둥 10주 중 부식된 5주 전면 교체

기둥 10주 중 파손된 5주 하부 동바리 이음 교체

- 교체되는 기둥은 느티나무를 사용(습기에 강함)

전면 교체 기둥

동바리 이음 기둥

숙정문 마루 평면도

전면 우측 귓기둥 부식 상황

․미장 및 수장공사 : 숙정문 마루 및 마루틀 전면 해체 보수

․지붕공사

- 목재 지붕틀은 해체 후 재설치

- 지붕의 기존 기와는 70% 재활용

․부대공사

- 좌 ‧ 우측 협문 문짝 및 여담 줄눈보수

- 문루 상부 좌, 우측 주변 바닥 정비(생석회 다짐)

- 문루 하부 통로 바닥(삼화토다짐), 정면 마당 정비(마사토다짐)

※ 단청공사는 목부재가 건조된 이후인 2018년에 추진(하자방지)

Ⅲ				향후계획
					ㅊㅊ	ㅊ

□ 2017. 1. ~ 2. : 숙정문 해체 보수공사 발주

□ 2017. 3. ~ 12. : 공사 시행 및 완료

□ 2018. 1. ~ 2. : 숙정문 단청공사 발주(단청공사)

□ 2018. 3. ~ 12. : 숙정문 단청공사 시행 및 완료

붙임  설계설명서 및 시방서 1부.  끝.