문서번호	토목부-346
결재일자	2017.1.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
지풍근		권혁대	01/05 김영수
협조
	주무관		이정원

미끄럼 방지 시설 설치 계획 보고

(겸재교 건설 및 연결도로 확장공사)

2017.1.

도시기반시설본부

(토목부)

미끄럼 방지 시설 설치 계획 보고

(겸재교 건설 및 연결도로 확장공사)

겸재교 시․종점부 보도육교 계단 및 보도데크 연결로를 이용하는 이용자가 동결로 인한 낙상 등의 안전사고 발생이 예상되어 미끄럼 방지 시설(논슬립) 설치 계획 보고임

Ⅰ		관련근거

○ 동일감 제17-3호(2017.1.4.) 실정보고 제출

- 논슬립 추가 설치 검토보고

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 겸재교 건설 및 연결도로 확장공사

○ 공사위치 : 동대문구 휘경동 휘경여중고 ~ 중랑구 면목동 동일로 사거리

○ 공사규모

- 본교량   : B=18.24m, L=235m(Extra Dosed교)

- 접속교량 : B=9m, L=160m, 접속램프 2개소

- 도로확장 : B=20m→30m, L=750m

○ 공사기간 : ′08.10.23. ∼ ′17.1.31.

○ 도 급 비 : 31,761백만원

○ 감 리 단 : ㈜동일기술공사 외 1개사 ○ 시 공 사 : ㈜한진중공업 외 1개사

○ 공 정 률 : 99%

Ⅲ		보고내용

□ 겸재교(시․종점부) 미끄럼 방지 시설(논슬립) 설치

○ 겸재교(시․종점부) 보도육교 및 보도데크 연결로를 이용하는 이용자가 동결로 인한 낙상 등의 안전사고 발생 예방을 위해 미끄럼 방지 시설(논슬립) 설치

〈설치도면〉

〈현황사진〉

보도육교(시점부)
보도육교(종점부)

보도데크(시점부)
보도데크(종점부)

〈수량현황〉

구 분	규 격	단 위	당 초	변 경	증․감	비 고
계단 논슬립		[eqn: m]	137	298	161
경사로 논슬립		[eqn: m]	-	638	638

〈공사비 현황〉

(단위 : 천원 VAT포함)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
부대공
계단 논슬립	2,473	5,380	2,907
경사로 논슬립	-	9,885	9,885
직접공사비	2,473	15,264	12,791
제경비	254	2,008	1,754
공급액	2,727	17,273	14,545
부가세	273	1,727	1,455
도급액	3,000	19,000	16,000

Ⅳ		조치계획

○ 보도육교 계단 및 보도데크 연결로를 이용하는 이용자의 안전사고 예방을 위하여 미끄럼 방지 시설 추가 설치는 적정함으로 향후 설계 변경시 반영하고자 함.

붙 임 : 감리단 검토 의견서 1부.  끝.