“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(국회대로 지하차도 및 상부 공원화 1단계 중첩구간)

1. 도로계획과-18947호(2017.01.04.)와 관련입니다.

2. 우리과에서 시행중인‘국회대로 지하차도 및 상부 공원화 기본 및 실시설계-1단계 중첩구간)’에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 국회대로 지하차도 및 상부 공원화 기본 및 실시설계-1단계 중첩구간

나. 계약자 : ㈜진우엔지니어링코리아

다. 준공기한

구 분	당 초	변 경
	2017.01.08.	2017.05.08.

라. 귀책사유 : 서울특별시

붙 임 : 1) 준공기한 연기의뢰서 1부.

2) 준공기한 연기보고   1부.

3) 합의각서            1부.  끝.

	도로계획과장
주무관	최송천		민자사업팀장	정회원		도로계획과장	01/05 하종현
협조자
시행	도로계획과-298	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가) 10층	/
전화	02-2133-8072	/전송	0221330763	/	csc1969@seoul.go.kr	/	대시민공개