문서번호	토목부-337
결재일자	2017.1.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
심규진		이동훈	01/05 김영수
협조
	주무관		오열상

물가변동으로 인한 계약금액 조정(4회) 검토보고

< 월드컵대교 건설공사 >

2017. 1.

도시기반시설본부

(토 목 부)

『월드컵대교 건설공사』

물가변동으로 인한 계약금액 조정(4회) 검토보고

『월드컵대교 건설공사』물가변동으로 인한 계약금액 조정(4회) 신청에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		관련근거

❍「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제22조

❍「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제73조 및 시행규칙 제72조

Ⅱ		공사개요

❍ 공사규모 : 폭 31.4m(6차로), 연장 1,980m

❍ 공사기간 : 2010. 3.22. ~ 2020. 8.31. (8차 : 2016. 1.19. ~ 12.31.)

❍ 도 급 비 : 177,008백만원 (8차 : 16,700백만원)

❍ 시 공 사 : 삼성물산㈜ 외 2개사

❍ 감 리 단 : ㈜포스코엔지니어링 외 1개사

Ⅲ		계약금액조정 요건 검토

❍ 물가변동 계약금액조정 요건 충족여부 검토(지수조정률 적용)

검토항목	기 준 내 용	검 토 내 용	비 고
기간요건	- 직전조정 기준일로부터 90이상 경과	- 직전조정일 : ‘13.9.1. - 조정기준일 : ‘16.9.1. → 90일 이상 경과	적정
등락요건	- 지수조정률이 100분의 3이상 증감된 떄	- 조정기준일의 조정률 → 3.31% > 3%	적정
신청요건	- 계약상대자의 청구가 있을 때	- ‘16.12.19. : 물가변동으로 인한 계약금액조정(제4회) 신청	적정

Ⅳ		계약금액조정 검토

❍ 물가변동 대상금액 검토

(단위 : 천원)

총계약금액 (A)	1~7차준공 (B)	8차 공사금액 중 제외금액 MAX(예정,실행,기성) (C)	P.S. 제외금액 (D)	물가변동 제외금액 (E=B+C+D)	물가변동 적용금액 (F=A-E)
177,008,000	47,291,400	14,205,161	5,616,250	67,112,811	109,895,189

❍ 물가변동 조정금액 검토

(단위 : 천원)

총계약금액 (A)	물가변동 제외금액 (B)	물가변동 적용금액 (C=A-B)	지수조정률 (D)	물가 변동금액 (E=C×D)	선금급 공제액 (F)	물가변동 조정금액 (G=E-F)
177,008,000	67,112,811	109,895,189	3.31%	3,637,530	72,235	3,565,295

Ⅴ		조치계획

❍ 위 보고내용과 같이 물가변동으로 인한 계약금액조정이 관련 규정에 적법하고 적정하게 산출되었으므로 추후 설계변경시 반영코자 함.

붙  임 : 1. 건설사업관리단 검토의견서 1부.

2. 물가변경으로 인한 계약금액조정(4회) 보고서 1부(별도).  끝.