문서번호	조경과-107
결재일자	2017.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	주무관		조경과장		관리부장		서울대공원장
조진성	강금완		강인호		김명용		01/09 송천헌
협 조
	전략기획실장					윤대진
	주무관					김근주
	주무관					호명옥

'서울대공원 치유의 숲' 조성사업 추진계획

2017. 1.

서울대공원

(조경과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

‘서울대공원 치유의 숲’ 조성사업 추진계획

청계산의 풍부한 산림자원을 활용하고 시민들의 녹색복지 실현과 삶의 질 향상을 위하여 ‘치유의 숲’ 조성을 추진하고자 함

□ 사업개요

○ 대 상 지 : 서울대공원 청계산 일대

○ 사업기간 : 2017 ~ 2020년

○ 사업내용 : 치유의 숲 조성(약54ha)

- 주요시설 : 치유센터, 치유숲길, 명상공간, 숲체험장, 편익시설 등

○ 사 업 비 : 4,800백만원(조성비 4,400, 설계비 400)

※ 산림청 국․시비매칭(50%) 사업(지역발전특별회계)

○ 연차별 투자계획

구 분	계	‘17년	‘18년	‘19년	‘20년
예 산 액 (백만원)	4,800	400	2,200	2,200	-
사업내용		◦기본계획 수립 ◦기본및실시설계	◦조성공사(1년차)	◦조성공사(2년차)	◦치유의숲 개장

□ 2017년 추진계획

○ ‘치유의 숲’ 기본계획 수립

- 기본계획 수립 후 서울시투자심사, 중앙투자심사 상정

○ ‘치유의 숲’ 조성계획 승인 신청(경기도지사)

- 소규모환경영향평가, 사전재해영향성검토 등 관련부처 협의

- 개발제한구역관리계획, 공원조성계획 등 관련계획 변경 병행

○ 기본 및 실시설계 시행(건축분야 별도)

- 실시계획 인가, 개발제한구역 행위허가 등

○ 소요예산 : 400백만원

- 기본계획 / 기본 및 실시설계, 사전재해영향성 검토 등 : 340백만원

- 소규모환경영향평가, 매장문화재지표조사 등 : 60백만원

□ 향후일정

○ ’17. 1 ~  2월 : 기술용역 심사 및 발주

○ ’17. 2 ~  8월 : 기본계획 수립 및 투자심사

○ ’17. 8 ~  9월 : 조성계획 승인 신청, 관련부처 협의 등

○ ’17. 9 ~ 12월 : 기본 및 실시설계.  끝.