문서번호	문화체육과-856
결재일자	2017.1.9.
공개여부	대시민공개

주무관	성북동역사문화담당	문화체육과장		복지문화국장		부구청장		구청장
유현희	이병곤	장순봉		최병재		김병환		01/09 김영배
협 조
					교육아동청소년담당관		민지선
					어르신복지과장		이만형
	기획예산과장		권용대		마을민주주의과장		한재헌
	건축과장		임철수		도시재생디자인과장		김영미

과거와 현재, 공존,

선잠(실크)박물관 조성 추진계획

복지문화국

문 화 체 육 과

과거와 현재, 공존,
선잠(실크)박물관 조성 추진계획

조선시대 국가제례를 지낸 장소로서 역사·문화적인 가치가 있는 선잠단(사적 제83호)의 정체성 및 역사성을 알리고 상징성 강화를 위한 선잠박물관 조성계획을 수립하여 시민이 공유할 수 있는 문화공간을 조성하고자 함.

Ⅰ		추진근거 및 배경

추진근거

□ 근거법규

- 문화예술진흥법 제5조 <문화예술공간의 설치 권장>

- 박물관 및 미술관 진흥법 제12조 <공공박물관 설립과 운영>

□ 한양도성 유네스코 등재추진, 성북동 역사문화지구 지구단위계획 결정

<서울특별고시 제2013-403호>

□ 실크박물관 건립 추진계획 <서울시 역사문화재과–25274, 2014.11.25.>

□ 민선6기 서울시장 공약 「한양도성 및 주변지역 역사문화 관광벨트 조성」 및 행복4구 플랜의 핵심과제「자연역사문화관광벨트 조성」추진사업 연계

□ 성북동 역사문화자원 기초자료 조사 연구 용역 <2016.4월 서울시 문화정책과>

추진배경 및 필요성

□ 성북동 역사문화지구 내 역사문화자원이 산재하나 연계·활용 문화거점시설 부족한 실정

※ 성북구 문화재 현황

구분 계	국 가 지 정								서 울 시 지 정
	소계	사적	명승	국보	보물	중 요 민속자료	중요무형 문 화 재	등 록 문화재	소계	유 형 문화재	기념물	민 속 자 료	문화재 자료	무 형 문화재
156	96	7	2	17	33	19	5	13	60	44	1	4	7	4

- 주변의 한국가구박물관, 간송미술관, 길상사, 성락원 등과 연계하여 관광활성화 시너지 효과 유도

□ 선잠단지(국가사적 제83호)는 조선시대 왕비가 집전하여 국가제례를 지낸 장소이고 우리조상들이 의생활을 중요하게 인식했음을 상징하는 대표적인 장소로서 선잠단 정체성과 가치를 알리는 역사문화시설이 요구됨

⇒ 1993년 이후 성북구에서는 매년 선잠제향을 재현하며 현재까지 시연중

Ⅱ		그간 추진사항

2013.11.28. : 성북동 역사문화지구 지구단위계획 결정 (서울시고시 제2013-403호)

2014. 9. 20 : 선잠단지 복원화 정비사업 국고보조금 예산교부 사전통지

2014.10.29. : 투자심사 (결과 : 조건부 추진)

2014.11.25. :  실크박물관 건립추진 계획 (서울시 역사문화재과-25274)

2015.10. 2. :  2015년 4차 서울시 투자심사 통과 (건립적정)

2015.10.22. :  실크박물관 건립 서울시 보조금 교부

2016. 4월   :  성북동 역사문화자원 기초자료 조사 연구 용역

(2016.4월 서울시 문화정책과)

※ 부지 매입난항 등 조성부지 재검토 (노인정·청소년 공부방<성북동 66-21>에 조성 제안)

2016. 4월 ~ 7월 : 선잠단지 역사성 고증 기초학술 연구용역

2016. 9월~11월 : 선잠단지 발굴조사

2016.11.14. :  선잠(실크)박물관 조성 기본구상안 용역

(용역기간 : 2016. 11월 ~ 2017. 3월)

Ⅲ		추 진 방 향

「선잠단지 복원화 사업」과 연계 선잠단지의 정체성 및 상징성 강화, 역사문화 거점시설 조성

우리전통 의생활 문화의 독창적이고 고급스러움 소개하고 관광상품개발과 연계하여 한국적인 전통문화를 대표하는 명소 및 관광인프라 구축

한국의 미적가치 소개, 문화적 정체성을 발굴하고 현대 감성에 맞는 새로운 가치를 재창조하여 지역브랜드 강화, 선잠단지 주변 전통문화거리 조성으로 마을공유경제 활성화

실크제작 과정을 과학,기술의 이해 프로그램 제공

성북동에서 거주하는 여러 대사관 나라의 다양한 실크소재 의생활 기획전시

Ⅳ		사 업 개 요

대 상 지 : 성북구 성북동 66-21 (노인정·청소년 공부방 기존 공공시설물)

규    모 : 대지 300㎡, 건물연면적 339㎡

※ 지하1층(34.98㎡), 성북노인정(101.4㎡,1층), 청소년공부방 (202.8㎡,2·3층)

사업기간 : 2015년 ~ 2018년

사업내용 : 선잠단지 관련 전시관, 3D체험 영상관 조성 등

사 업 비 : 2,341백만원 (시비, 사고이월예산, 총사업비 3,900백만원중 2015교부예산)

※ 잔여사업비 1,559백만원은 추후 선잠박물관 인근 부지매입 연계 시설조성 검토

예산과목 : 문화예술진흥 및 문화유산보존전승, 관광산업진흥, 실크박물관 건립 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅴ		세부추진계획

조성계획

□ 조성방법 : 기존건물 리모델링

- 부지현황 : 성북동 66-21 (대지면적 : 300㎡)

- 시설규모 : 건물연면적 339㎡ (약 103평)

□ 공간구성 계획

해당층	면적	공간계획	컨텐츠
지하1층	34.98㎡	수장고
지상1층	101.4㎡	사무실, 편의시설	커뮤니티 시설 등
지상2층	101.4㎡	전시실	실크, 잠사 등 관련 유물전시
지상3층	101.4㎡	3D체험 영상관	선잠단지 역사성 및 전통복시문화 등 소개, 간접체험 프로그램 지원

※ 제2종 공립박물관 등록요건 (박물관및미술관진흥법 제10조 관련-별표2)

유형	박물관 자료	학예사	시설
자료관·사료관·유물관·전시장·전시관·향토관·교육관·문서관·기념관·보존소·민속관·민속촌·문화관 및 예술관	60점 이상	1명 이상	1. 82제곱미터 이상의 전시실 2. 수장고 3. 사무실 또는 연구실·자료실·도서실 및 강당 중 1개 시설 4. 화재·도난 방지시설, 온습도 조절장치

추진절차

설계업체선정 (1월중)		유물 확보공고 (3월중)		중간설계 (기본 및 실시설계) (3월 ~ 5월)		공사업체 전시업체 입찰공고 (5월중)		리모델링 전시시설 설치 (7월~11월)		개관식 (2018.2월중)

총사업비 : 2,341백만원

(단위:백만원)

구 분	총사업비	공사비	기본구상 용역	중간설계 및 감리비 (기본및실시설계)	전시설계	유물구입비 등 기타시설 부대경비
금 액	2,341	750	20	60	20	1,491

전시구성 및 프로그램운영 계획

□ 전시뿐 아니라 다양한 교육 및 연구 프로그램을 개발하여 ‘사람을 위한 박물관’, 즉 관람객과 소통하는 박물관 전시체험 기획

□ 성북동에서 거주하는 다양한 나라의 대사관 실크 전통복식 테마 기획전

□ 잠사박물관, 패션박물관 등 관련 박물관과 MOU체결하여 대여, 기증,테마 기획전시

□ 실크소재 관련 지역예술가와 콜라보 기획 – 지역예술가 컨텐츠 기획전시 및 체험 프로그램 개발   ex) 효재전시전, 김은영매듭장 전시전 등

□ 3D첨단 체험영상관을 설치하여 선잠단지 역사성, 실크관련 전통복식문화 소개, 섬잠제향 등 관련 다양한 컨텐츠 간접체험,교육프로그램 제공

유물수집계획

□ 실크 관련 소장품 수집은 기증(증여와 유증), 구입, 교환과 기탁(위탁), 대여 등의 방법으로 가능하며, 규정과 절차에 따라 선정함

- 유물수집개시를 공고하고 잠사, 실크, 관련 문서 등 각종 자료에 대한 기증 및 기탁운동 시행

- 유상기증/ 기탁 또는 대여/ 무상 기증

- 개인소장자 및 전문수집가 현황·의사파악, 기증의사 확인

- 공모를 통한 전시기획 제안접수 및 선정 등 대여

□ 성북동에서 활동한 실크 관련 예술가 소장품 기증 및 대여 유도

□ 관련 유물 소장가로 부터 법적 절차에 따라 고증을 통하여 유물 구입 등

조직운영계획

□ 운영방법 : 직영운영  ※추후 효율성 등 고려, 필요시 위탁운영 검토

□ 조직도

								관 장 (관련 전공자 출신)
																								운영위원회
전시․교육(1) 학예연구사																							경영지원 및 정보화(1)

□ 소요예산 : 연간 168,774천원

- 인건비 : 연간 103,434천원

∘ 시설 운영인원은 총 3名이며, 관장 1명, 학예연구사 1명, 행정직원 1명 구성

(단위 : 명/천원)

구 분	직급	직 위	인원	1인당 연간인건비	연간 총인건비
계			3	103,434	103,434
시설장	다급	관장	1	39,217	39,217
연구원	다급	학예연구사	1	39,217	39,217
행정관리직	마급	직원	1	25,000	25,000

- 운영비 : 연간   65,340천원

∘ 66천원 × 990㎡ = 65,340천원

∘ 성북구립미술관의 단위면적 1㎡당 평균 운영비(66천원)를 적용

행정사항

협조내용	협조부서
청소년공부방 이전	교육아동청소년담당관
노인정 이전	어르신복지과
성북동 역사문화지구 특별계획구역내 문화시설 조성 검토	도시재생디자인과
설계 및 공사, 공사감독	건 축 과

Ⅵ		향후추진계획

∘‘17. 1월 ~ 관련부서 협조사항 통보	건축과, 어르신복지과 ----- 교육아동청소년담당관
∘‘17. 1월 ~ 설계업체 선정	설계업체 선정(건축과)
∘‘17. 3월~5월 기본 및 실시설계	------------------- 건축과
∘‘17. 3월~6월 유물확보 공고	---------- 기본구상안 용역 (문화체육과)
∘‘17. 5월~6월 공사업체 입찰공고	------------------- 건축과
전시설계 및 제작설치 입찰공고	--------------- 문화체육과
∘‘17. 7월~9월 건물리모델링 공사	------------------- 건축과
∘‘17. 8월~11월 전시시설 설치	--------------- 문화체육과
∘‘18. 2월 ~ 개관식	--------------- 문화체육과