투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	우이신설경전철주식회사 대표이사 서상일
(경유)
제목	우이~신설 경전철 민간투자사업 자금재조달 공유이익 산정 관련 협조 요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우이(관리) 제2016-107호(’16.10.31) 및 공공투자관리센터-35호(’17.1.5) 자금재조달 관련입니다.

3. KDI PIMAC에서 공기연장이 반영된 기본재무모델 제출을 요청하고 있는 바 공기연장 반영 방법에 관한 그간 우리시와의 협의 결과를 토대로 아래 사항을 유념하여 기본재무모델을 작성 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 보완특약 재무모델 수익률(6.29%)이 실시협약 수익률(6.10%)과 일치하도록 수정 필요

나. 주무관청 귀책에 따른 공기연장 기간(13.25개월)만 재무모델에 반영하고 사업비 투입 스케줄은 실적치를 기본으로 하되 잔여 공사비는 공정률(실적)에 따라 안분

다. 자기자본 비율인하(25%￫20%)는 별도의 자금재조달 대상에 해당할 것으로 판단되므로 기본재무모델 작성 시 반영 필요. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	송정아		경전철관리과장	홍숭희		도시철도계획부장	01/11 권영찬
협조자	주무관	윤득근
시행	도시철도계획부-362	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스 9층 프리미어플레이스 9층 도시기반시설본부 도시철도사업부	/
전화	02-772-7152	/전송	02-772-7305	/		/	대시민공개