문서번호	조경과-468
결재일자	2017.1.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장	푸른도시국장
변동풍	송동명	이원영	01/11 최광빈

2016년 가로변 녹지량 확충사업 추진결과 보고

2017. 1.

푸른도시국

(조경과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 가로변 녹지량 확충사업 추진결과 보고

가로변 유휴공간의 녹지조성 및 정비를 위한 「2016년 가로변 녹지량 확충사업 」의 추진결과를 보고합니다.

1		사업개요

❍ 대    상: 성동구 천호대로(용답동 175-5일대) 등 29개소

❍ 규    모: 109,195㎡(송파구 잔디관리 70,360㎡ 포함)

❍ 사업기간: 2016. 1. ~ 12.

❍ 사업내용: 가로변 유휴공간 녹지 조성 및 정비

❍ 사업예산: 2,724백만원(시설비 2,721, 시설부대비 3)

2		2016년 사업 추진내용

	<중점 추진사항>
‣ 가로변 유휴공간(중앙분리대, 안전지대, 가로녹지 등)에 녹지 조성 ‣ 빗물이 유입될 수 있도록 빗물유입 화단 조성 ‣ 가로숲 조성 및 의자 설치로 휴식공간 조성 ‣ 단풍과 열매, 꽃 등이 아름다운 수종 도입

❍ 녹지조성(정비)

(단위 : m, ㎡)

개 소	합 계		조 성		정 비
	연장	면적	연장	면적	연장	면적
29	13,815	109,195	2,215	4,435	11,600	104,760

※ 추진실적 세부내역은 [붙임1] 첨부

○ 수목 및 초화류 식재

수 목			초화류(본)	식생매트 (㎡)
합 계	교 목(주)	관 목(주)
66,018	292	65,726	243,007	904

○ 편의시설

파고라(동)	앉은벽(m)	의 자(조)
3	182	32

❍ 잘된 점

- 서울형 공공조경가 그룹의 설계심의 참여로 설계 수준 향상(자문 17건)

- 유휴공지에 활용하여 편의시설(파고라, 의자) 설치로 휴게공간 마련

❍ 미흡한 점

- 좁은 공간에 부적합한 시설 설치(영등포 도림로 교통섬 장대석 의자)

- 공사가 대부분 봄철 보다 가을 시행(상반기 2건, 하반기 13건)

※ 하반기 추진한 ‘유명조경가와 함께 하는 가로변 조경개선 시범사업’ 제외

❍ 개선할 점

- 설계심의 자문결과 반영 여부 점검(준공 전 현장점검 및 준공보고시 사진 제출)

- 조기에 설계하고 시공토록 설계도서 작성비 사전 재배정

- 가로녹지의 대형수목 아래 견딜 수 있는 하층식재 도입 필요

3		예산집행

(단위 : 천원)

과목	예산현액	집 행 액	사고이월	집행잔액	집 행 율	비 고
합 계	2,724,000	2,298,893	301,395	123,712	95%
시설비	2,721,000	2,295,893	301,395	123,712
부대비	3,000	3,000	-	-

▸사고이월 : 하반기 추진한 ‘유명조경가와 함께 하는 가로변 조경개선 시범사업’의 중구 세종대로(131,557천원), 중랑구 신내역로(169,838천원)

4		2017년 중점 추진사항

❍ 서울형 공공조경가 그룹의 설계심의 참여로 설계 수준 향상

❍ 빗물이 유입될 수 있도록 빗물유입 화단 조성

❍ 가로숲 조성 및 의자 설치로 휴식공간 조성

❍ 하층식생이 빈약한 가로녹지에 식생 및 편의시설 개선

붙임 1. 2016년 가로변 녹지량 확충사업 추진실적 1부.

2. 추진실적 사진 1부.  끝.