문서번호	토목과-423
결재일자	2017.1.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		도로관리팀장		토목과장		안전건설교통국장
최영기		백원기		박주완		01/11 김재겸
협조
	도로조명팀장		정찬재
	굴착복구팀장		박병국

★ ◉

사근고개 걷고 싶은 거리 및 지중화 공사 시행 계획

2017.  1.

	성 동 구
	(토 목 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☑ 공약(약속)사업 ☑ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통·갈등 분야 고려사항		●	구민			:	유 ☑ ( 사근동 주민 ) 무 ☑
		●	전문가			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	갈등발생요인			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 □ 유지비용 □ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 □ ( ) 무 □
		●	서울시	:	유 ☑ ( 서울시 보도환경개선과 ) 무 □
		●	기업	:	유 ☑ ( 한국전력공사, 7개 통신사 ) 무 □
		●	민간단체	:	유 □ ( ) 무 □
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 □
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

사근고개 걷고 싶은 거리 및 지중화 공사 시행 계획

사근고개 걷고 싶은 거리 조성공사와 사근동길 전기․통신선로 지중화 공사 시행에 따른 추진계획 보고임.

Ⅰ		사 업 개 요

☐ 사 업 명: 사근고개 걷고 싶은 거리 및 지중화 공사

☐ 위    치: 사근동길(한양대병원 삼거리~사근삼거리)

☐ 규    모

❍ 사근고개 걷고 싶은 거리 조성공사

- 보도 확장 및 보도 정비: B=1.5m~2.0m→2.0m~2.5m L=790m

- 벚꽃 식재 및 화단 조성, 가로등(LED) 26주 교체 등

❍ 사근동길 전기 및 통신선로 지중화 공사

- 한전 지상변압기 8대, 지상개폐기 3대 설치

- 한전 가공선로 및 7개 통신사 가공선로 지중화

☐ 기    간: 2014. 8. ~ 2017. 12.

☐ 사 업 비: 5,436백만원(당초 3,950백만원 → 증 1,486백만원)

❍ 걷고싶은 거리 조성공사: 1,200백만원(당초 1,250백만원 → 감 50백만원)

- 보도 투수블록 포장을 불투수 블록 포장으로 변경

❍ 지중화 공사: 4,236백만원{당초 2,700백만원 → 증 1,536백만원(구분담 768백만원)}

- 한전 지상기기 설치위치 변경 및 관로 굴착 연장 증가 등: 399백만원

- 통신 본선관로 및 골목길 연결 지선관로 굴착연장 증가: 430백만원

- 통신 지상 케이블방송 광통신 지중화: 300백만원

- 통신사 및 굴착연장 증가에 따른 공사비 증가 등: 406백만원

Ⅱ		추 진 경 과

❍ 2015.  6.  1.  ’사근고개 걷고 싶은 거리 조성‘ 계획 수립(구청장방침 제326호)

❍ 2015.  7. 27. ～ 11. 30.  1단계 구간 공사 완료

❍ 2015. 12. 17. ～ 2016. 6. 7.  지상기기 11대 설치 장소 선정

❍ 2016.  8. 24.  이행 협약 체결(한전 및 각 통신사)

❍ 2015.  8. 24 ～ 12. 5.  지중화 공사 실시설계 시행(한전 및 각 통신사)

❍ 2016. 10. 18.  한전 지중화 공사비 분담금(1,220백만원) 청구

❍ 2016. 12.  5.  통신 지중화 공사비 분담금(898백만원) 청구

❍ 2016. 12. 26.  지중화 공사비 분담금(1차분) 납부

- 한전 분담금 납부금액: 904백만원(총 분담금의 75%)

- 통신 분담금 납부금액: 646백만원(총 분담금의 72%)

Ⅲ		문 제 점 및 대 책

☐ 문제점: 사업예산 968백만원 부족

❍ 걷고 싶은 거리 조성공사 부족 예산: 368백만원

❍ 지중화 공사 부족 예산: 600백만원

☐ 대   책

❍ 걷고 싶은 거리 조성공사: 2017년 토목과 단가계약 공사에서 시행

- 아스팔트 포장정비 공사: 165백만원 - 도로굴착복구 단가공사에서 시행

- 보안등 및 전기공사: 35백만원 - 보안등 단가공사에서 시행

- 보도공사 및 건설폐기물 처리: 168백만원 - 도로시설물 단가공사 시행

※ 공사 시기는 지중화 공사 추진 일정에 따라 시행 예정

공사비는 추정금액으로 향후 조정될 수 있음

❍ 지중화공사: 2017년 특별교부금, 특별교부세 등으로 확보 추진

Ⅳ		향 후 계 획

❍ 2016. 1. ~ 2.   지중화공사 발주 및 계약(한전, 통신사)

❍ 2016. 3.       지중화공사 착공(한전, 통신사)

❍ 2017. 1. ~ 6.   부족예산 확보 추진

❍ 2017. 3.~12.   걷고 싶은 거리 및 지중화 공사 병행 시행

❍ 2017. 12.      걷고 싶은 거리 및 지중화 공사 완료