문서번호	수난구조대-196
결재일자	2017.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자		수난구조대장	119특수구조단장
김민호		김덕봉	01/12 민춘기
협 조	행정지원과장			권태미
	지대장			홍성삼
	지대장			윤진욱
	지대장			이낙규
	담당자			代오창훈

	2017년도
수난구조대 예산집행 추진계획

2017. 1.

119특수구조단 수난구조대

2017년도 수난구조대 예산집행 추진계획

명확하고 체계적인 예산운용을 통한 세출예산의 적기지출 및 조기집행으로   수난구조대의 효율적인 운영에 만전을 기하기 위함.

Ⅰ		관련근거

□ 2017년 소방재난본부 예산서

□ 소방행정과-398(2017.1.4)「2017회계연도 소방안전특별회계 예산

조기집행 추진 철저」

Ⅱ		2017년도 수난구조대 예산편성 내역

(단위 : 천원)

구 분	2017 예산	세 부 내 역
계	651,480
사무관리비	24,330	◦ 장비유지관리 및 소모품 구매 24,330
공공운영비	468,660	◦ 구조선박 보수유지 및 소모성 부품구매 53,000 ◦ 구조선박 중간 및 정기검사 273,290 ◦ 수난구조대 보트 유류비 142,370
시설비	154,900	◦ 뚝섬청사 도장공사 37,000 ◦ 반포청사 계류장 설치 66,200 ◦ 여의도청사 안전도검사 결과 보강공사 51,700
재료비	3,590	◦ 구급장비 유지보수 및 소모품 구매 3,590

Ⅲ		2017년도 예산집행 세부 추진계획

1		사무관리비

□ 수난구조장비 소모품 구매

○ 품    목 : 잠수장갑 등 9종 220점 구매

○ 예 산 액 : 15,000천원

○ 추진계획

- 계약방법 : 전자공개 수의계약

- 계획수립, 입찰 및 계약 : 2017. 1. 15. - 2. 28.

- 물품검수 및 대금지급 : 2017. 3. 1. - 3. 31.

□ [전반기] 수난구조장비 외부 전문업체 점검 및 정비

○ 정비내용

- 건식잠수복 정비

- BCD(부력조절기) 점검·정비

- 레귤레이터 오버홀(1단계, 2단계)

○ 예 산 액 : 5,000천원

○ 추진계획

- 계획수립 및 계약 : 2017. 3. 1. - 3. 31.

- 용역검수 및 대금지급 : 2017. 4. 1. - 4. 30.

□ [후반기] 수난구조장비 외부 전문업체 점검 및 정비

○ 정비내용

- 건식잠수복 정비

- BCD(부력조절기) 점검·정비

- 레귤레이터 오버홀(1단계, 2단계)

○ 예 산 액 : 4,330천원

○ 추진계획

- 계획수립 및 계약 : 2017. 10. 1. - 10. 31.

- 용역검수 및 대금지급 : 2017. 11. 1. - 11. 30.

2		공공운영비

□ [전반기]구조선박 소모성 부품 구매

○ 품    목 : 연료필터 등 구조정(구조보트) 정비부품 및 공구

○ 예 산 액 : 20,000천원

○ 추진계획

- 계약방법 : 전자공개 수의계약

- 계획수립, 입찰 및 계약 : 2017. 2. 1. - 3. 15.

- 물품검수 및 대금지급 : 2017. 3. 16. - 4. 30.

□ [후반기]구조선박 소모성 부품 구매

○ 품    목 : 연료필터 등 구조정(구조보트) 정비부품 및 공구

○ 예 산 액 : 10,000천원

○ 추진계획

- 계약방법 : 전자공개 수의계약

- 계획수립, 입찰 및 계약 : 2017. 9. 1. - 10. 15.

- 물품검수 및 대금지급 : 2017. 10. 16. - 11. 30.

□ 구조선박 중간검사 및 정기검사

○ 대    상 : 검사기간 도래 구조정 및 구조보트

○ 검사내용 : 선박안전법에 따른 선체, 기관, 구명 및 소방설비 점검·정비

○ 예 산 액 : 273,290천원

○ 선박별 추진기간(※ 조선소 상가일정에 따라 변경될 수 있음)

선박목록	검사종류	추진기간	금액(천원)
서울701호	정기검사	2017. 1. 1. - 3. 31.	150,000
서울705호	정기검사	2017. 2. 1. - 4. 30.	37,300
서울706호	정기검사	2017. 7. 1. - 9. 30.	30,000
서울709호	제1종 중간검사	2017. 7. 1. - 9. 30.	27,995
서울710호	제1종 중간검사	2017. 7. 1. - 9. 30.	27,995
합 계			273,290

□ 광나루수난구조대 운용 구조보트 육상운반 작업

○ 대    상 : 702-1호 구조보트

○ 작업내용 : 크레인 및 화물트럭을 이용한 육상이송 작업(배치 및 철수)

○ 예 산 액 : 3,000천원

○ 추진계획

- 계획수립 및 계약 : 2017. 5월 및 10월 중

- 용역검수 및 대금지급 : 2017. 5월 및 10월 중

□ 수난구조대 보트 유류비

○ 대    상 : 수난구조대 구조선박 - 서울701호 등 15척

○ 제품유종 : 휘발유 및 경유

○ 예 산 액 : 142,370천원

○ 추진기간 : 2017. 1. 15. - 12. 31.(연중 매주1회 집행)

□ 구조선박 주기관 및 보조기관 외부전문업체 일반정비 및 점검

○ 대    상 : 수난구조대 구조선박 – 서울704호 등 6척

○ 정비내역

- 전문정비 : 제작사 컴퓨터 진단(ECU DATA CHECK)

- 기본정비 : 각종필터류 및 오일류 등 소모품 교환

○ 예 산 액 : 20,000천원

○ 선박별 추진계획

선박명	추진기간	금액(천원)	정비업체
서울704호	2017. 10. 1. ~ 10. 31.	4,500	스즈끼,머큐리등 기관제조사 국내 대리점
서울705호	2017. 10. 1. ~ 10. 31.	3,500
서울706호	2017. 2. 1. ~ 2. 28.	3,000
서울709호	2017. 2. 1. ~ 2. 28.	3,000
서울710호	2017. 2. 1. ~ 2. 28.	3,000
서울711호	2017. 10. 1. ~ 10. 31.	3,000

3		시설비

□ 뚝섬수난구조대 청사 도장공사

○ 대    상 : 뚝섬수난구조대 청사

○ 사업내용 : 청사 1,2층 바닥, 외벽 및 잠수풀장 등의 방청·도색

○ 예 산 액 : 37,000천원

○ 추진계획

- 계약방법 : 전자공개 수의계약

- 계획수립 : 2017. 1. 15. - 3. 15.

- 입찰 및 계약 : 2017. 3. 16. – 4. 15.

- 준공검사 및 대금지급 : 2017. 5월중

□ 반포수난구조대 청사 계류장 설치

○ 대    상 : 반포수난구조대 청사

○ 사업내용 : 구조보트 전용계류장 신규설치

○ 예 산 액 : 66,200천원

○ 추진계획

- 계약방법 : 전자공개 수의계약

- 계획수립 : 2017. 1. 15. - 3. 15.

- 입찰 및 계약 : 2017. 3. 16. – 4. 15.

- 준공검사 및 대금지급 : 2017. 5월중

□ 여의도수난구조대 청사 안전도검사 권고사항 보강공사

○ 대    상 : 여의도수난구조대 청사

○ 사업내용 : 청사내외 부식부 방청·도색 및 평형수탱크 도장 등

○ 예 산 액 : 51,700천원

○ 추진계획

- 계약방법 : 전자공개 수의계약

- 계획수립 : 2017. 1. 15. - 3. 15.

- 입찰 및 계약 : 2017. 3. 16. – 4. 15.

- 준공검사 및 대금지급 : 2017. 5월중

4		재료비

□ 구급장비 유지보수 및 소모품 구매

○ 품   목 : 소독용 알코올 등 18종 400점

○ 예 산 액 : 3,590천원(전반기-2,000천원, 후반기-1,590천원)

○ 추진계획

- 계획수립 및 계약 : 2017. 2월 및 7월 중

- 물품검수 및 대금지급 : 2017. 2월 및 7월 중

Ⅳ		2017년도 추진사업 월별 일정표

예산항목	추 진 내 용		2017년
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사무관리비 (201-01)	수난구조장비 소모품 구매
	수난구조장비 외부 전문업체 점검 및 정비(전반기/후반기)
공공운영비 (201-02)	구조선박 소모성 부품 구매 (전반기/후반기)
	구조선박 중간검사 및 정기검사	701호
		705호
		706호
		709호
		710호
	광나루수난구조대 운용 구조보트 육상운반작업
	수난구조대 보트 유류비
	구조선박 외부전문업체 기관점검 및 정비	704호
		705호
		706호
		709호
		710호
		711호
시설비 (401-01)	뚝섬수난청사 도장 공사
	반포수난청사 계류장 설치
	여의도수난청사 안전도검사 권고사항 보강공사
재료비 (206-01)	구급장비 유지보수 및 소모품 구매

Ⅴ		세출예산 분기별 예상 집행금액 및 집행율

(단위 : 천원)

구분	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
금액	651,480	211,600	254,300	123,180	62,400	-
비율	100%	32.48%	39.03%	18.90%	9.59%	분기집행금액 /전체예산
집행율	-	32.48%	71.51%	90.41%	100%	-

Ⅵ		행정사항

각 사업 담당자는 해당사업이 기간내 완료될수 있도록 사전준비에 만전을 기하여 주시고, 2017년도 예산집행에 차질이 없도록 상기 내용을 숙지하여 주시기 바랍니다.  끝.