문서번호	설비부-674
결재일자	2017.1.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		유병기	01/13 권오식
협 조
	주무관			이종근

『서울재사용플라자 건립 공사-설비분야』

총차(3차) 공사 예비 준공검사 시행계획 보고

2017. 1.

도시기반시설본부

(설비부)

『서울재사용플라자 건립 공사-설비분야』

총차(3차) 공사 예비 준공검사 시행계획 보고

본 공사의 준공기한이 도래하여 원활한 마무리를 위하여 건설기술 진흥법 시행령 제78조(준공) 및 건설사업관리 업무지침서 제100조(준공검사)에 의거 예비준공검사를 시행코자 함.

사업개요

❍ 위    치 : 성동구 용답동 250-1 외 2필지

❍ 규    모 : 지하2층/지상5층, 연면적 16,529㎡

- 기 계 : 냉난방 510RT, 지열 420RT, 승강기 3대

- 전 기 : 수전용량 2,000kVA, 태양광 124kW, 발전기 400kVA

❍ 사업기간 : 2015.06. ∼ 2017. 3.15(3차 - ‘16.12 ~ ’17.03.15)

❍ 감리/시공 : ㈜펨코엔지니어링 외 1개사 / ㈜광민건설,(주)태광전력,신양통신(주)

❍ 도 급 비

- 기 계 : 총차4,824,952천원(3차1,324,952천원)

- 전 기 : 총차2,607,967천원(3차 899,539천원)

- 통 신 : 총차  732,372천원(3차 276,935천원)

관련근거

❍ 건설기술 진흥법 시행령 제78조 및 건설사업관리 업무지침서 제100조

❍ PC 17-055,056호(2017.01.11) : 예비준공검사 요청

예비 준공검사 시행

❍ 일    시 : 2017. 01. 18(수)  13:00 ~

❍ 장    소 : 서울 재사용플라자 건립 공사 현장

❍ 참 여 자 : 총 12 명

- 총    괄 : 설비부 열빛총괄과장  유병기

- 검 사 자 : 기계․소방(이종근), 전기․통신․소방(곽용길)

- 입 회 자

･ 분야별 비상주 감리원 4명(기계 1, 전기 1, 통신1, 소방 1)

･ 책임감리원 및 현장 감리원 등 5명(기계 1, 전기 1, 통신1, 소방1)

❍ 예비준공검사 내용

- 준공기한 내 준공 가능 여부 미진사항 사전보완

- 감리원 확인한 정산설계도서, 준공체크리스트 등에 의거 검사

- 검사내용은 준공검사에 준하여 철저하게 시행

- 준공된 공사가 설계서대로 시공되었는지 여부

- 품질관리상태 및 현장시공 적정 여부 등

※ 검사자는 시공된 부분이 구조물의 내부 또는 지하부 등 시공후 매몰되어 사후검사가 곤란한 부분과 주요 구조물에 중대한 피해를 주거나 대량의 파손  및 재시공 행위를 요하는 검사는 감리조서와 사전검사 등을 근거로 시행

향후계획

❍ 예비준공검사 후 보완사항은 감리원에게 보완 지시하고

❍ 시공자는 예비준공 검사의 지적사항 등을 완전히 보완한 후 책임감리원의 확인을 받은 후 준공검사원을 제출

붙임 1. 책임감리원 예비준공검사 요청서 1부.

2. 예비준공검사 현장점검표 1부.  끝.