문서번호	자연생태과-1079
결재일자	2017.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	생태복원팀장	자연생태과장	푸른도시국장
소향순	박경옥	유영봉	01/13 최광빈

2017년 하천생태복원 및 녹화사업 추진계획

2017. 1

푸른도시국

(자연생태과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	관련자치구
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2017. 하천생태복원 및 녹화사업 추진계획

도심 하천변 훼손된 공간과 틈새 공간에 생물 서식기반 조성 및 녹화로   하천 생태와 경관을 개선하여 생태적 휴식 공간으로 조성

Ⅰ		사업개요

위    치 : 중랑천(성동․동대문․중랑),안양천(영등포․구로․양천․금천),

홍제천(서대문),불광천(서대문),도림천(영등포․구로),

탄천(강남),고덕천(강동),우이천(강북)

사업규모 : 227,040㎡

사업내용 : 식생기반 조성 및 제방사면 녹화 등

사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 10.

사 업 비 : 총 8,300백만원

연도별 추진 현황

구 분	계	2006~2013	2014	2015	2016
하천 생태 복원 사업	총96개소 1,962,918㎡	66개소 1,092,628㎡	16개소 377,350㎡	14개소 263,600㎡	14개소 229,340㎡
예산액(백만원)	53,324	39,486	4,669	4,154	5,015

Ⅱ		추진방향

귀화·외래 식물 제거하고 자생식물 식재로 하천 고유 식생 회복

식생 여건이 미약한 하천변에 활착력이 강한 식물을 식재하여 하천 경관 개선

하천변 녹음수 식재 등으로 하천 녹지축 연결 및 제방 산책로 등과 연계 생태적 시민 휴식 공간 조성

Ⅲ		세부 추진계획

사업 대상지 현황

자치구별	사 업 개 요	규모 (㎡)	사 업 비 (단위 : 백만원)
			계	시설비	시 설 부대비
계	8개 하천(15개소)	227,040	8,300	8,290	10
중랑구	･ 위치 : 중랑천(월릉교~이화교) ･ 내용 : 사면·둔치 녹화 등	18,000	1,995	1,995
동대문구	･ 위치 : 중랑천(군자교~이화교) ･ 내용 : 사면·둔치 녹화 등	15,000	500	500
성동구	･ 위치 : 중랑천(송정제방) ･ 내용 : 사면녹화 및 수목 식재	5,000	200	200
강북구	･ 위치 : 우이천 ･ 내용 : 사면녹화 및 수목식재 등	3,000	150	150
서대문구	･ 위치 : 불광천(증산교~증산3교) ･ 내용 : 식생기반조성 및 수목, 초화류 식재	4,800	400	400
	･ 위치 : 홍제천(홍지문∼사천교) ･ 내용 : 수목 및 초화류 식재	18,360	700	700
구로구	･ 위치 : 도림천(도림1교~신도림교) ･ 내용 : 식생기반조성 및 수목, 초화류 식재	3,000	150	150
	･ 위치 : 안양천(신정교~안양교) ･ 내용 : 식생기반조성 및 수목, 초화류 식재	4,800	400	400
양천구	･ 위치 : 안양천 제방 좌안(양평교~양화교) ･ 내용 : 식생기반조성 및 수목, 초화류 식재	19,000	745	745
영등포구	･ 위치 : 안양천(오목교~목동교) ･ 내용 : 식생기반조성 및 수목, 초화류 식재	1,500	300	300
	･ 위치 : 안양천(한강합수부~신정교) 도림천(신정교~구로디지털단지역) ･ 내용 : 그늘목 식재	8,000	300	300
금천구	･ 위치 : 안양천 제방사면 (금천교~철산교) ･ 내용 : 식생기반조성 및 수목, 초화류 식재	7,800	700	700
강남구	･ 위치 : 탄천(탄천2교~탄천1교) ･ 내용 : 식생기반조성 및 수목, 초화류 식재	3,000	300	300
송파구	･ 위치 : 탄천(광평교~대곡교) ･ 내용 : 식생기반조성 및 수목, 초화류 식재	2,500	800	800
강동구	･ 위치 : 고덕천(상일동 425-7~고덕동 한강 합류점 ･ 내용 : 식생기반조성 및 수목, 초화류 식재	113,280	650	650
자연생태과	･ 시설부대비		10	-	10

추진일정 및 방법

사업추진 계획 수립․통보(자연생태과⇨자치구): ’17. 1. 20.

※ 사업추진시 2∼3월, 6∼7월 사업대상지 현황사진 촬영 실시

용역 타당성심사(자치구⇨기술심사담당관): ’17. 1. 20.~2. 20.

설계 용역 시행(자치구)                   : ’17. 2. ~  5. 30.

- 유수 소통, 치수 등에 방해가 되지 않도록 하천법 제25조『하천 기본계획』을 준수하여 사업을 추진하고, 필요시 공사 착공전 하천관리위원회(시) 심의, 하천점용 협의 등의 제반 절차 이행

설계 심의(자치구⇨자연생태과)          : ’17. 4. ~  5.

- 설계심의는 설계 공정 70% 정도 진행 시 요청

※ 설계심의는 대상지 현황등에 따라 현장 실시 가능

계약 심사(자치구⇨계약심사과)	: ’17. 4. ~ 5.

- 계약심사 : 공사금액 3억(조경) 이상인 경우에는 시 계약심사과,

공사금액 3억(조경) 미만은 기관 자체 일상감사 실시

공사 시행(자치구)	: ’17. 6. ~ 10.

공사 착․준공보고 : 발주는 6월초 이전, 준공은 최소 10월말 완료

- 사업완료 후 사업비 집행액 세부내역(지출원인행위부 등), 준공내역서,

공사현장 사진 등을 첨부하여 제출

Ⅳ		세부 추진방법(추진상의 유의사항)

설계단계부터 관련 전문가를 참여시키고, 사업 대상 하천 특유의 자생 생물종 복원 중심의 하천사업 추진

하천이나 제방의 본래 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 녹화사업 추진

설계과정에 주민, 유관기관, 해당지역 시․구의원의 의견을 수렴하여 민원발생 등으로 인해 사업이 지연되는 사례 방지

설계용역시 설계변경 등 주요사항은 시(자연생태과)․자치구 사전 협의 시행

하천의 경관적 통일성 및 연속성을 고려하여 시설물의 디자인 및 색채 등은      『공원시설 색채디자인 가이드라인』준수

- 시설물의 재료는 자연친화적(목재, 흙, 자연석재) 소재 사용

- 번쩍거리는 광택 스테인레스나 철재 재료 사용 자제

- 시설물의 색채 선정시 자연과의 조화성을 고려하고 색상의 통일성 유지

- 현란한 원색 사용은 금하고 자연경관의 배경색채로 선택

하천변 수목 식재시 전도 예방 조치(와이어 지주대 설치 등 주변 여건 고려)

기타 하천생태복원 사업 추진에 따른 세부사항 등은 아래의 규정 등을 참조하여 시행

- 『하천에서 나무심기 및 관리에 관한 기준(국토교통부 2007.5.29)』

- 『생태하천 복원사업 추진지침(환경부, 2012)』

- 『서울특별시 전문시방서(조경편, 2009)』

따로붙임  1. 연도별 추진현황 1부.

2. 공원시설 색채디자인 가이드라인 1부(별송).

3. 사업착공 및 준공보고 서식 1부.  끝.