문서번호	토목부-5540
결재일자	2014.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
박천용		최순철	03/24 노우성
협조

「율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사」

전력구 이설시기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.03.

도시기반시설본부

(토 목 부)

「율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사」

전력구 이설시기 검토 보고

율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사와 병행 시행중인 율곡로 전력구 이설공사 시행부서인 한전 경인건설처로부터 시공가능 일정 협의에 대한 검토 보고임.

1		관련근거

❍ 한전 경인건설처 62101-238호(‘14.02.26) : 【전력구 이설시기 협의】

❍ 율곡감 제2014-74호(‘14.03.03) : 【실정보고 : 전력구 이설시기 보고】

2		공사개요

❍ 공 사 명 :「율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사」

❍ 공사규모 : 폭 6차로, 연장 800m

❍ 공사기간 : 2010.01.11 ∼ 2015.06.30

❍ 공 사 비 : 금854억원(공사비 508, 보상비 323, 기타 23)

❍ 시 공 사 : 북일종합건설(주)외 2개사

3		전력구 이설 현황

❍ 평 면 도

❍ 단 면 도

구 분	규 격	연 장	일 정	비 고
1구간	Ø 2,100mm	185.5m	2015.04 ∼ 2015.05
2구간	〃	324.5m	2015.03 ∼ 2015.04
3구간	〃	336.4m	2015.05 ∼ 2015.06

❍ 철거 가능 시기

3		감리 검토의견

❍ 율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사 구간내 기존 송전선로 철거는 지하차도(2구간 : L=324.5m), 공사 시점부(1구간 : L=185.5m), 공사 종점부(3구간 : L=336.4m) 순으로 시행할 예정이나,

❍ 철거는 2015년 3월경 이후에 가능하며 부득이 토목 공정이 지연될 경우에는 철거시기도 순연될 수 있음.

4		조치 의견

❍ 위 보고와 같이 기존 송전선로 철거는 지하차도(2구간 : L=324.5m), 공사 시점부(1구간 : L=185.5m), 공사 종점부(3구간 : L=336.4m) 순으로 시행할 예정이나,

❍ 철거는 2015년 3월경 이후에 철거가 가능하며 부득이 토목공정 지연될 경우에는 철거시기도 순연될 수 있음을 통보코자 합니다.

붙 임 : 감리원 검토의견 1부.  끝.