“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰

우리과에서 시행중인 ‘동부간선도로 지하화 타당성 조사 및 기본계획용역’에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용역명 : 동부간선도로 지하화 타당성 조사 및 기본계획

2. 계약자 : ㈜경동엔지니어링 외 2개사

3. 준공기한 연기내역

구 분	당 초	변 경
총 차	2017.1.19	2017.6.30
2 차	2017.1.19	2017.6.30

4. 귀책사유 : 서울특별시

따로 붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기방침서 1부.

3. 용역계약 변경합의서 1부. 끝.

	도로계획과장
전문관	정용훈		도로정책팀장	이승석		도로계획과장	01/11 하종현
협조자
시행	도로계획과-540	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 도로계획과	/
전화	02)2133-8065	/전송	02)2133-0763	/	hoon0916@seoul.go.kr	/	대시민공개