시 행	설비부-731
시행일자
수 신 자	내부결재

결재	주무관	건축설비과장	설비부장
	배수웅	김은덕	01/16 권오식

설계변경 자문회의(소위원회) 자문결과(제1차)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			설비부-425호				요청부서		환경설비과		자문일자		2017.01.16
공 사 명			서울역 7017 프로젝트 전기공사
공 사 개 요			공사규모				통합폴 111본, 경관조명 3,639m, 비상발전기(130kw) 등
			공사기간				2016.05.02.~2017.06.01
			감 리 사				㈜진우엔지니어링코리아
			설 계 사				㈜종합건축사 사무소 디자인캠프문박
			시 공 사				대명전력외 1
자문요청사유							5,000만원 이상 변경사항
설계변경사항(요약) 주관부서 및 설계 당선자 요구사항 반영, 현장여건 변경에 따른 설계변경 - 옥외 태양광공사, 관수제어공사 등 추가 및 배관, 배선 물량 변경 - 물가변동 반영, 퇴직공제부금 등 보험료 정산
원설계자 의견
자문결과		조건부			붙임 자문위원 지적사항 보완 조건
자문결과 조치					· 자문위원 지적사항을 보완하여 설계에 반영조치
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위원장			김은덕				간 사		배수웅
	위 원			곽용길				위 원		박병환
	위 원			진종구				위 원		유영선