투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(2공구와 간섭구간 공정관리 철저 지시)

1.업무지시현장 :  하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 주식회사 대한콘설탄트

2.작 성 일 자 : 2017-01-16 13:01:52

3.지 시 내 용:

1) 우리부에서 추진중인 「하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사」 와 관련 공사 종점부인 4-2구간의 토공은 2공구와 간섭된 구간을 제외하고는 완료되었으나 현재까지 구조물 공사가 지연되고 있는 사유와 향후 시공일정을 2017.1.18.일(수)한 보고하여 주시기 바라며,

2) 2공구와 간섭되는 구간의 토공이 지연되고 있어 본공사의 공정에 차질이 예상됨으로 2공구 발주처인 경기도와 업무협의코자 하오니 2공구과 간섭되는 구간의 공정현황 등 관련자료를  2017.1.20.일(금)한 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

주무관							임경태			토목1과장					01/16 윤방식
협조자
시행			도시철도토목부-786									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 9층 도시철도토목부															/
전화		772-7211						/전송			772-7306					/	lgt2004@seoul.go.kr												/	대시민공개