문서번호	교통운영과-888
결재일자	2017.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교통운영팀장	교통운영과장
백바름	서인석	01/13 강진동

2017년 제1차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 01

『2017년  제1차 도로점용공사장』

교통소통대책 자문회의 결과 보고

자문회의 개최 개요

❍ 개최일자 : 2016. 01. 12(목) 15:00 ~ 17:00

❍ 장    소 : 서울시청 서소문별관 1동 6층회의실

❍ 참석위원 : 9명 (당연직 : 1명, 위촉직 : 8명)

- 당연직 : 교통운영과장

- 위촉직 : 이동원 위원, 신건철 위원, 송두석 위원, 이지언 위원, 오은미 위원, 고진영 위원, 김지현 위원, 손영태 위원

- 간  사 : 교통운영팀장

❍ 자문대상 및 결과 : 총 3건 (조건부 시행 3건)

- 대치배수분구 하수관로 종합정비공사 (2공구)

- 5호선 마곡역 출입시설 추가 설치공사

- 하남선(5호선 연장) 11공구 건설공사 (변경)

자문안건(1) : 대치배수분구 하수관로 종합정비공사 (2공구)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공 사 시행자	비고
남부순환로 및 삼성로	2017.03.01∼ 2018.05.01	전일	1~2개 차로	강남구 치수과

❍ 자문결과 : 조건부 시행

❍ 자문회의 검토의견

- 굴삭기 재원(내폭) 및 단계별 굴착폭에 대해 재검토하여 공사방법, 장비배치, 점용면적을 제시하기 바라며, 그에 따른 교통소통대책을 재수립하기 바람

- 점용 차로수 추가에 따른 교차로 및 가로 서비스수준을 재분석하기 바라며, 그에 따른 용량 확보 방안(23시 이후 공사시행 등)을 제시하기 바람

- 단계별 교통량도에 대해 교차로 차로운영을 고려하여 보완하기 바람

- 단계별 안전휀스는 차선 끝을 기준으로 50cm 이상 이격한 위치에 설치하도록 하며, 부득이한 경우 최소 30cm이상 확보토록 함

- 보행 불편사항을 재검토하여 보행 안전을 확보할 수 있도록 함

- 2단계 버스정류소 동시 정차대수를 고려하여 교차로 방면으로 이전 검토하기 바람

- 4∼5단계 점용구간과 접하는 이면도로의 교통량을 고려하여 교대통행이 가능하도록 교통처리계획을 수립하기 바람

- 7단계 동측접근로(잠실→대치역사거리) 점용 연장을 축소하여 우회전 차량의 동선을 확보하기 바람

자문안건(2) : 5호선 마곡역 출입시설 추가 설치공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공 사 시행자	비고
공항대로 및 마곡중앙로	2017.03.01. ∼2019.03.30	전일	1~2개 차로	서울특별시 도시철도공사

❍ 자문결과 : 조건부 시행

❍ 자문회의 검토의견

- 도로점용공사에 따른 중앙버스전용차로 불편사항 및 교통사고가 발생하지 않도록 철저한 현장관리가 필요하오니, 교통운영과와 협의하여 매월 도로점용공사장 현황 보고를 시행하기 바람

- 마곡역교차로→김포공항 방면 버스정류소 이전을 최소화 할 수 있도록 교통소통대책을 수립하기 바라며, 야간공사에 대한 공사시간을 명확히 제시하기 바람

- 중장비가 필요한 단계의 경우, 야간공사로 시행하여 교통 불편사항을 최소화하기 바라며, 중앙버스전용차로 선형 변경에 따른 유도선을 설치하기 바람

- 도로점용공사장에 따른 차로운영과 공사안내표지가 동일하도록 수정하기 바람

- 단계별 점용면적에 대해 재검토하여 최종 시공부분에서 추가 점용이 발생하지 않도록 보완하기 바람

- 130단계 남북축 차로 선형을 유턴차로 이전을 통해 보완하기 바람

- 횡단보도 이용 보행자와 우회전 차량의 상충을 보완할 수 있는 방안을 강구하기 바람

자문안건(3) : 하남선(5호선 연장) 11공구 건설공사 (변경)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공 사 시행자	비고
고덕로	2015.07.10.∼ 2018.12.31	전일	1∼2개 차로	도시기반시설본부

❍ 자문결과 : 관계기관 회의 후 조건부 시행

❍ 자문회의 검토의견

- 「하남선(5호선 연장) 11공구 건설공사」 관계기관 회의를 통해 주변 민원 및 변경 사항에 면밀히 재검토하기 바라며, 회의 결과에 따라 교통소통대책을 보완하기 바람 (필수사항)

- 상일로 유턴차로 신설을 통해 상일동역교차로 차량 상충점 축소를 유도하기 바라며, 지역주민의 요구사항(민원)을 검토하여 상일동역교차로 회전제약에 대해 추가 검토하기 바람

- 상일동역교차로 동서축 차로 선형으로 인한 교통사고가 우려되오니, 작업구 위치 및 단계순서 등 공사내용 변경을 통해 차로 선형을 보완하기 바람

- 28단계 등 남→서 좌회전 차량의 안전을 확보하기 위해 서측 접근로 점용구간 축소 및 차로확보를 재검토하기 바람

- 야간 통행의 안전성 확보를 위해 시인성 확보 시설(교차로 집중조명 등)을 설치할 수 있도록 검토하기 바람

- 21단계 등 교차로 인접 차로선형 변경이 발생하지 않도록 차로운영 계획을 보완하기 바라며, 단계별 유도선에 대해 재검토하기 바람

붙  임 : 1. 자문위원 참석 명단 1부.

2. 공사업체 참석 명단 1부. 끝.