“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	문화예술 특화거리 및 여행자 편의시설 조성 공사 관급자재 구매 계약 변경 의뢰

1. 관광정책과-651(2017.1.12.)호와 관련입니다.

2. 시행 중인 문화예술 특화거리 및 여행자 편의시설 조성 공사 관급자재 구매 계약의 기간을 아래와 같이 변경하고자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 문화예술 특화거리 및 여행자 편의시설 조성 공사 관급자재 구매

나. 납 품 일 : ’17. 1. 26

다. 구매금액 : 94,566,220원

- 레미콘 : 44,419,990원(품대계 : 44,193,280원, 수수료 226,710원)

- 철근또는강철봉 : 50,146,230원(품대계 : 49,876,900원, 수수료 : 269,330원)

라. 예산과목 : 관광사업과, 서울만의 특화관광자원을 활용한 서울관광 활성화, 서울
강점 특화관광 콘텐츠 확충, 서울 매력명소 관광자원 개발 활용, 시설비

마. 설계변경내역 : 납품기간 변경

- 당 초 : ’17. 1. 26

- 변 경 : ’17.3.31

바. 설계변경사유

- 여행자 편의시설 조성 공사가 설연휴 등으로 연장됨에 따라 레미콘 및 철근 납품 기간 변경

붙  임 : 계약변경 계획서 1부. 끝.

	관광정책과장
주무관	김보경		실무사무관	代권훈오		관광정책과장	01/13 김재용
협조자
시행	관광정책과-742	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	2133-2817	/전송	2133-1067	/	megbkkim@seoul.go.kr	/	부분공개(6)