함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	계획설계과장
(경유)
제 목	상수도 공간정보 사용기간 연기 요청에 따른 회신

1. 계획설계과-320(2017.01.11.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 요청하신 상수도 공간정보 사용기간 연기 요청 건에 대하여 아래와 승인하오니 다음 사항을 반드시 준수하여 주시기 바랍니다.

가. 제공된 자료는 ‘공개제한’ 정보로 요청한 사업 이외의 목적으로 사용할 수 없으니	불법 복제 및 외부로 유출되지 않도록 자료관리 철저

나. 사업수행 목적으로 용역 및 외부 업체에 제공할 경우 해당 사업 목적으로만 사용	하도록 서약서, 인수증을 용역 및 외부 업체로부터 수령하고 사업 종료 시 성과물과	제공된 자료 회수

다. 제공기간이 만료되면 원본과 별도의 저장매체(PC, USB 등)에 저장한 자료를 파기하고	파기확인서(붙임) 제출

용 역 명	당 초 기 간	변 경 기 간	변 경 사 유	담 당 자
낙산배수지 건설공사 기본 및 실시설계용역	2016.04.29.~2016.12.31	2016.04.29.~2017.02.28	용역기간 연장	양윤선 (3146-1417)
수유6배수지 건설공사 기본 및 실시설계용역	2016.04.04.~2016.12.29	2016.04.04.~2017.03.31	용역기간 연장	김형식 (3146-1416)
우면산가압장 급수체계 개선 기본 및 실시설계용역	2016.05.02.~2016.12.27	2016.05.02.~2017.02.28	용역기간 연장	최영서 (3146-1414)

붙임 : 상수도 공간정보 자료 파기확인서(양식) 1부.  끝.

	공간정보과장
★주무관	박현대		공간정보과장	01/17 이성환
협조자	주무관	정은화
시행	공간정보과-498	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1556	/전송	02-3146-1529	/	hd5285@seoul.go.kr	/	대시민공개