투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(디지털창업과장)
(경유)
제 목	「서울창업허브 리모델링공사 」 관련 통보

1. 「서울창업허브 리모델링공사」와 관련입니다.

2. 위 공사는 2016년 2월 공사착공하여 기존 건축물의 석면 등의 특정 폐기물 철거 및 처리와 기존건축물의 기초 및 구조보강 등 당초 설계시 예상하지 못한 여러요인의 공기지연 사유발생으로 공정관리에 어려움을 격고 있습니다.

3. 신축공사가 아닌 기존건축물의 리모델링 공사이므로 공정관리 및 공사비 등의 불확정 요인이 타공사에 비하여 많이 발생하여 계획공정대비 일부 부진공정의 발생은 있으나 이에대한 특단의 공정관리를 하고있음을 알려드립니다.

4. 따라서 우리본부는 언론보도자료를 통한 금년 4월중 준공예정 일정에 대한 귀 부서의 추진계획을 감안하여 2017년 4월 28일까지 건축물 완공이 되도록 업무추진예정이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임 : 서울창업허브 리모델링공사 공정표 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정호기		복지시설과장	조영수		건축부장	01/17 김진용
협조자
시행	건축부-1013	(		)	접수		(		)
우	04520	중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2652	/전송	02-3708-2659	/	bluenight@seoul.go.kr	/	부분공개(7)