문서번호	계약심사과-858
결재일자	2017.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		심사총괄팀장	계약심사과장
임종호		최광운	전결 01/16 안호
협 조
	설비심사팀장			최주용
	건축심사팀장			서홍일
	주무관			임장경

「세종문화회관 블랙박스극장 조성사업 실시설계」 설계경제성(VE) 심사 실행계획

2017. 1.

「세종문화회관 블랙박스극장 조성사업 실시설계」

설계경제성(VE) 심사 실행계획

세종문화회관에서 추진하고 있는「세종문화회관 블랙박스극장 조성사업 실시설계」에 대한 심사 전담팀을 구성하고, 설계경제성(VE) 실행 계획을 수립하여 추진하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 건설기술진흥법 시행령 제75조

□ 설계경제성 심사 확대 시행계획(행정1부시장방침 제45호, ’16.02.15.)

Ⅱ		심사개요

□ 발주부서 : 세종문화회관(시설운영팀)

□ 사  업  명 : 세종문화회관 블랙박스극장 조성사업 실시설계

□ 위    치 : 종로구 세종대로 175 세종문화회관

□ 사업내용 : 블랙박스극장 및 지하철역연결통로 조성(지하3~지상1 증축 및 리모델링)

- 블랙박스극장 : 연면적 2,617㎡(증축 792㎡ 포함)

- 지하철역연결통로 : 규모 53㎡(증축 53㎡)

□ 공 사 비 : 6,975백만원

□ 공사기간 : 착공일로부터 8개월

Ⅲ		심사계획

□ 주요 심사내용

○ 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

○ 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

○ 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성 등

□ 시행방법 : 전담팀 구성하여 심사

○ 전담팀 : 15명 내외

구 분	구 성 내 용	역 할
VE책임자 (3명)	▸외부 설계VE 전문가 3명 - (CVS) 종합건축사사무소서준 배홍열 대표이사 - 진행 및 보고서 작성 2명	설계경제성 심사 업무 진행 심사결과 종합 결과보고서 작성
VE담당관	▸ 임종호 주무관	심사 총괄 및 결과보고서 정리
팀 원 (5명)	▸ 외부 검토위원 4명 - (건축) 황인걸 대표 명인건축 - (토질) 최종민 상무 ㈜홍익기술단 - (전기) 김수복 부사장 ㈜동일건축 - (기계) 박찬정 전무이사 설화엔지니어링 ▸ 내부 검토위원 1명 - (기계) 김경일 주무관	정보 분석, 검토, 아이디어 제안, 발표, 평가, 보고서 작성 등
발주부서 및 설계자	* ***** *********	사업설명 등 (설계내용, 현장설명 등)

□ 설계경제성 심사 시행절차

추진 일정		검토 절차		업무 내용
’17. 1. 11.		설계경제성 운영 의뢰 (발주기관 → 계약심사과)		▸설계경제성 심사 신청서 접수
’17. 1. 16.		설계경제성 심사 계획수립 (VE담당관)		▸추진일정, 시행방법 등 ▸자료 사전검토(심사위원)
’17. 1. 31. ~ 2. 14.(11일)		설계경제성 검토회의 (심사 전담팀)		▸현장 확인 - 사업설명(설계자) ▸1,2차 검토회의 : 대안 구체화 - 아이디어제시, 결과이행 회의 ▸최종 검토회의 : 보완 및 의사결정
’17. 2. 14. ~ 2. 15.(2일)		설계경제성 심사 제안서 통보 (계약심사과 → 발주기관)		▸설계경제성 심사 제안서 통보
’17. 2. 16. ~ 2. 20.(3일)		제안서 검토 및 반영계획 제출 (발주기관 → 계약심사과)		▸설계경제성 심사제안서 수용 여부 결정 및 통보
’17. 2. 28.		심사결과 통보 (계약심사과 → 발주기관)		▸최종 결과보고서 작성 ▸심사결과 통보

□ 설계경제성 심사 검토회의 세부일정

일 시	내 용
’17.1.31.(화) 14:00~18:00	- 사업설명 및 현장답사 ‣ 장소 : 세종문화회관 블랙박스극장
’17.2. 6.(월) 10:00~18:00	- 1차 검토회의 : 아이디어 제시, 대안 구체화 ‣ 장소 : 세종문화회관內 회의실
’17.2. 7.(화) 10:00~18:00	- 2차 검토회의 : 대안에 대한 가치평가 및 분석 ‣ 장소 : 세종문화회관內 회의실
’17.2.14.(화) 10:00~18:00	- 최종 검토회의 : 보완 및 의사결정 ‣ 장소 : 세종문화회관內 회의실

Ⅳ		소요예산

□ 소요예산 : 10,965천원

○ 외부전문가 수당 : 9,965천원

— 리더(기술사+보고서작성)   : 2,601천원(2,601천원 × 1명)

— 위원(기술사)                : 5,356천원(1,339천원 × 4명)

— 퍼실리테이터(중급기술자) : 2,008천원(1,004천원 × 2명)

※「설계경제성심사제도 운영현황 및 개선방안」(계약심사과-10559(’15.6.15))에 따라 산출

○ 회의다과비 등 운영비 : 1,000천원

□ 예산과목

○ 세종문화회관 자체예산 활용

Ⅴ		향후계획

□ 설계경제성 심사결과서 통보  - - -  - - -  ’17.2.28.

붙   임 : 1) 설계경제성 심사 요청 공문 1부.

2) 설계경제성 심사 신청서 1부.  끝.