투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	도급공사 공사기간 연기의뢰(북부여성창업플라자 조성 기계설비공사)

1. 북부여성창업플라자 목양CM단 MYCM-17.01.13-01(‘17.01.13) 「북부여성창업플라자 조성 공사 기계공사의 공기연장 건」호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리 본부에서 시행중인 『북부여성창업플라자조성 기계설비공사』에 대하여 아래와 같이 공사기간 연장의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 북부여성창업플라자조성 기계설비공사

나. 계 약 자 : 동방엠씨개발㈜ 대표 안석준

다. 도급금액 : 600,697,000원

라. 공사기간 연기요청 내용

구 분	공사기간
	변경 전	변경 후
기계설비공사	2016.03.16.. ~ 2017.01.20	2016.03.16. ~ 2017.02.15

마. 연기사유 : 건축공사 선행공정 연장에 따른 기계공사 연기

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  :  관련문서(합의각서 포함) 1부.  끝

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이강욱		건축설비과장	김은덕		설비부장	01/16 권오식
협조자	계약1팀장	조현
시행	설비부-736	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시중구 청계천로8(무교동96번지)프리미어플레이스 빌딩 15층 108-1	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8629	/전송	02-3708-8659	/	24326@seoul.go.kr	/	대시민공개