문서번호	정보공개정책과-1467
결재일자	2017.1.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기록문화팀장	정보공개정책과장
원종관		김재봉	01/18 조영삼
협조	정보소통혁신팀장		강남태
	기록관리팀장		김종필

- 서울기록원 디지털 아카이브 구축 사업 관련 - S/W 개발사업 적정 사업기간 산정 위원회 구성 계획

2017. 1

정보공개정책과

‐ 서울기록원 디지털 아카이브 구축 사업 관련  ‐

S/W 개발사업 적정 사업기간 산정 위원회 구성계획

서울기록원 디지털 아카이브 구축 사업과 관련하여 소프트웨어(S/W)개발 사업에 대한 적정사업 기간을 산정하기 위하여 위원회를 구성▪운영하고자 함

Ⅰ		추진 개 요

□ 추진근거

❍ 소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준 (미래부고시 2015-40호, ’15.6.17.)

- 대상 : 컨설팅, 운영·유지관리, 하드웨어 또는 상용 소프트웨어 도입을

제외한 S/W 개발 관련 사업

제4조의2(적정 사업기간의 산정) ① 발주자는 소프트웨어의 개발과 관련된 사업의 경우 「정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법」 제23조제2항에 따라 별표 2의 소프트웨어 개발사업 적정 사업기간 산정 기준을 활용하여 사업수행에 필요한 적정 사업기간을 산정하여야 한다.

② 발주자는 제1항의 적정 사업기간을 산정하기 위하여 산업계, 학계,  연구계, 국가기관등의 소속공무원 등 해당분야 전문가로 구성된 전문위원회(이하 "위원회”라 한다)를 위원장을 포함한 7인 이내의 위원으로 구성·운영할 수 있다.

❍ 위원회 구성을 통한 적정사업기간 산정으로 개발기간에 대한 객관적 검증 필요

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 서울기록원 디지털 아카이브 구축

❍ 추진기간 : 계약일로부터 ~ ‘17.12.15

❍ 소요예산 : 금1,100,000천원

❍ 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

□ 사업내용

❍ 서울기록원 영구기록물 관리 프로세스 기반 시스템 설계 및 구축

❍ 영구기록물 관리를 위한 분류체계 및 메타데이터 설계

❍ 기능개발 관련 S/W 개발 내용

- 영구기록물 관리 프로세스 기반 영구기록관리시스템 설계 및 구축(수집, 이관, 정리, 분류, 보존, 서비스)

- 대시민 기록정보서비스시스템 설계 및 구축

- 업무 유관 시스템(업무관리시스템, 행정정보포털, 정보소통광장, 통합 기록관리시스템) 및 이종(異種) 역사문화정보자원 연계

- 클라우드 플랫폼 및 머신러닝 기반 기술 적용

Ⅱ		적정 사업기간 산정 위원회 구성 및 운영

□ 위원회 구성(5명)

❍ 위 원 장 : 정보공개정책과장

❍ 외부위원 : 핸디소프트 김주영 부장

※ ‘16년 서울기록원 정보화전략계획 수립사업 PM

❍ 내부위원 : 정보소통혁신팀장, 기록관리팀장, 기록문화팀장

□ 위원회 운영

❍ 일시/장소 : ’17. 1. 19(목) 10:00~11:00 / 본청사 7층 회의실

❍ 역     할 : 소프트웨어 개발사업에 대한 적정 개발기간 산정

❍ 산 정 방 법 : 위원회 평가에 의한 산정

- 사업담당자의 사전조사결과(붙임1,2,3)에 대해 위원회 검토 후 사업기간 추정

- 소프트웨어 개발사업의 적정사업기간 위원별 산정서 작성(붙임4)

- 각 위원별 산정결과 조정

- 소프트웨어 개발사업의 적정사업기간 종합산정 및 산정서 작성(붙임5)

Ⅲ		행 정 사 항

□ 선정위원회 심의 결과 보고 및 제안요청서에 명시

□ 소요예산 : 150천원

❍ 위원회 외부위원 수당 : 150천원 X 1명 = 150천원

❍ 예산과목 : 정보관리강화, 기록물 시설관리, 기록정보관리, 사무관리비(100-201-01)

❍ 지출방법 : 일상경비 교부 및 위원수당 지급

붙임 : 1. 기능점수(FP) 기반 적정 개발기간 산정표 1부.

2. 조달청 유사사업 개발기간 공고 현황 1부.

3. 사업계획서, 예산설명서, 제안요청서 각 1부.

4. S/W 개발사업 적정사업기간 위원별 산정서 1부.

5. S/W 개발사업 적정사업기간 종합산정서 1부.

6. 서약서 1부.

7. 소프트웨어 관리감독에 관한 일반기준(미래부고시) 1부.  끝