투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	조달구매 납품기한 연기요청(2016년 낙산공원 보수정비공사)

1. 공원운영과-23673(2016.12.12.)호와 관련입니다.

2. 2016년 낙산공원 보수정비공사와 관련하여 조달물품구매 납품기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 조달물품구매(2016년 낙산공원 보수정비공사)

나. 납품요구번호 : 12-16-1-68810-00

다. 납품기한 연기 요청내역

물품식별 번 호	품 명	규격	단위	수량	단가	금액	납품기한연기		비고
							당초	변경
22944675	목재휀스	W1500×H1200	경간	300	330,000원	99,000,000원	‘17.1.31	‘17.4.10

라. 연기사유 :  공사일정과 연계하여 추진하고자 납품기한 연기요청

끝.

	시설과장
주무관	김기수		조경팀장	이무림		시설과장	01/18 김재균
협조자
시행	시설과-428	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231(예장동) 중부공원녹지사업소 시설과	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5967	/전송	02-3783-5969	/	pinus21@seoul.go.kr	/	대시민공개