★

문서번호	공원녹지과-1336
결재일자	2017.1.20.
공개여부	대시민공개

담 당	조경담당	공원녹지과장		도시환경국장
구경만	김성기	이정환		01/20 최성태
협 조

2017년 에코스쿨 조성사업  추진계획

도시환경국

공원녹지과

2017년 에코스쿨 조성사업  추진계획

학교 내 유휴공지를 자연적으로 녹화하여 학생들의 교육환경 개선과 정서함양에 기여하고 주민들에게 부족한 휴식·커뮤니티공간을 제공하여 지역생활 거점 공원으로 활용하고자 함

Ⅰ		추진근거

서울시 조경과-1089(2017.1.20.) : 2017년 에코스쿨 조성사업 추진계획 통보

Ⅱ		추진목표

자연학습장, 학교숲, 벽면녹화 등 다양한 녹화유형 반영

학교공동체 참여유도 및 공동유지관리 체계 확립

학생들 스스로 녹화활동을 체험할 수 있는 토대 제공

Ⅱ		2016년 추진실적

사 업 실 적	경동고등학교 조성사진(2016년)
- 학 교 명 : 경동고, 성북초, 홍대부중 - 규 모 : 2,950㎡ - 사 업 비 : 456백만원(시비) - 사업기간 : 2016. 8.25 ~ 11.30 - 사업내용 : 화단 및 휴게공간 조성 등 •수목식재 : 잎팝나무 등 13종 10,741주 •초 화 류 : 구절초, 꽃무릇 등 18종 21,340본

Ⅲ		2017년 사업개요

위    치 : 5개교(돈암초, 장위초, 숭례초, 석관중, 홍대부고)

규    모 : 5개교 총 3,100㎡

사업기간  : 2017. 02. ∼ 11.

내    용 : 휴게공간 조성, 노후시설물 정비, 생태숲, 화단조성

총사업비  : 627백만원(시비)

- 돈암초 200, 장위초 95, 숭례초 80, 석관중 52, 홍대부고 200

Ⅳ		세부추진 일정 및 계획

2017. 1. : 계획수립 및 기술용역 타당성 심사

2017. 2. : 에코스쿨 추진위원회 구성

○ 학생, 학부모, 학교(교장, 교사, 교직원) 및 지역 시의원 등 참여

○ 사업취지와 학교측 의견 사전 조율하여 원활한 사업추진 유도

○ 전체 사업단계에 참여토록 학교 여건에 맞는 역할 부여

2017. 2. ∼ 6. : 실시설계용역

○ 에코스쿨 추진위원회 대상 사업설명회

○ 서울시 설계심의 및 계약심사 등

2017. 6. : 공사발주 및 녹화협약 체결

○ 공동유지 관리체계 마련 및 관리수준 향상

2017. 7. ∼ 11. : 공사시행

붙 임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.