문서번호	노동정책담당관-704
결재일자	2017.1.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	노동보호팀장	노동정책담당관	일자리노동정책관
허준	유승현	강석	01/18 유연식

노동복합시설 조성을 위한

정밀안전진단 및 실측도면 작성 용역 추진계획

2017. 1.

일자리노동정책관

(노동정책담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

노동복합시설 조성을 위한

정밀안전진단 및 실측도면 작성 용역 추진계획

노동시설의 집약화를 통한 대시민 노동행정서비스 제고를 위해 조성하는 노동복합시설 대상 건물의 정밀안전진단 및 실측도면 작성 용역을 통해 건축물의 정확한실측 및 향후 리모델링 공사 등 추진 안정성을 확보하고자 함

1		용역개요

□ 용 역 명 : 노동복합시설 조성 대상 건물 정밀안전진단 및 실측도면작성 용역

□ 용역목적

○ 노동복합시설 조성을 위한 건물안전도 측정

○ 건물 실측도면 작성을 통해 건축물의 정확한 실측

○ 향후 건축구조 설계 및 공사 등 사업추진시 보수․보강 사항 반영

□ 대 상 지

○ 위    치 : 종로구 관수동 152-1

○ 규    모 : 대지 553.1㎡, 건물 2,062.24㎡

○ 도시계획 : 일반상업지역

○ 공간구성

구 분	면적(㎡)	용 도
1층	419.04	주차장, 하나은행365코너
2층	426.84	금융업소
3층	426.84	금융업소
4층	426.84	금융업소
5층	283.34	금융업소
옥탑	79.34	금융업소
계	2,062.24

□ 주요 과업내용

○ 대상건물의 실측도면 작성(평면 건축도면, 구조도)

○ 기초자료(점검, 계측 및 보수자료) 수집 및 분석

○ 현장조사 및 시험

○ 시설물의 내구성 및 내하력 조사

○ 상태평가, 안정성 평가 및 종합평가

○ 효율적인 유지관리방안 제시

○ 리모델링 시 보수‧보강방법 및 비용 제시

□ 용역기간 : 계약일로부터 1개월간

□ ***********************************

□ 계약방법 : 수의계약

○ 근    거 :「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조 제1항 제5호

○ 사    유 : 추정가격(부가세 제외)이 2천만원 이하의 소액 용역사업으로, 건축물 정밀안전진단 및 도면작성 전문업체와 수의계약 체결 추진

2		행정사항

□ 소요예산

○ 소요예산 : 22,000천원(부가세 포함)

○ 예산과목 : 일자리노동정책관 노동정책담당관, 노동존중문화 정착, 근로자 복지 증진, 노동복합시설 조성, 시설비(401-01)

□ 향후 추진일정

○ ’17. 1.17  : 기술용역심사 의뢰

○ ’17. 1.23~2.23 : 용역 추진

○ ’17. 2월 말 : 실시설계 공모 추진

붙임 1. 대상 위치도 및 현장사진 1부

2. 과업내용서 1부.  끝.

붙 임 1

위치도 및 현황사진

위치도
현황사진