함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 심의회 개최［2016년 도봉,노원구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사(장기계속단가계약)］ -설계변경(2차)

우리 사업소에서 시행중인 “2016년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 및 보수공사 (장기계속)”에 대하여 당초 계약물량 외 신규공종 발생 및 물량 증 ․ 감 사항이 있어 아래와 같이 설계변경 심의회를 개최코자 합니다.

가. 공사현황

○ 공 사 명 : 2016년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 및 보수공사(장기계속)

○ 주요 신규공종

공종	규격	단위	단가	비고
스테인레스관 부설공	20mm,지세	m	6,089	*********
주름마디 스텐관 부설공	13mm,지세	m	4,574	HN011132
나사조임식이음관접합	13mm,지세	개소	9,572	HN018132
슬립인조인트 접합공	13mm,지세	개소	4,175	HN020132
원형밸브실 설치공(기초재생PE)	D=300mm(흄관h=1.66)	개소	373,818	HNK14302
캡상승식밸브실 설치공	D=80~500mm	개소	56,464	HNK16150
맨홀보수	도로,Φ648상수,T=20㎜	개소	767,369	BTT공법
맨홀보수	도로,Φ648상수,T=50㎜	개소	912,211	BTT공법
맨홀보수	도로,Φ648상수,T=70㎜	개소	962,910	QMR-2공법
맨홀보수	도로,Φ648상수,T=100㎜	개소	1,021,392	QMR-2공법
맨홀보수	도로,Φ648상수,T=150㎜	개소	1,118,738	QMR-2공법
맨홀보수	도로,Φ648상수,T=200㎜	개소	1,217,958	QMR-2공법
월계배수지항출입구덮개교체	3.5*4.5	개소	7,445,668
월계배수지항출입문교체	1.2*2.0	개소	1,136,372
항뚜껑교체	1.5*1.5	개소	954,206
공릉배수지항출입구덮개교체	3.2*3.2	개소	8,139,810
메쉬휀스(중계가압장)	2*2*24	개소	3,062,950
강관 선홈통 설치	D=100mm	m	19,658	표준품셈건축부문13-2-4
고정밸브키 설치	원형변실, H=1-2.5m	개소	61,696	HK050130
경계블록설치	화강석	m	6,399	표준품셈토목부문12-5-3-1
안전시설비	야간(BTT,QMR-2공법)	개소	30,826
잔토소운반(0.4상차)	4.5DT,(집하장->현장3km)	㎥	7,382	*********
흄관기초	300	m	15,879
흄관기초	450	m	19,410
하수관절단	300	개소	2,655
하수관절단	450	개소	8,795
하수관천공및접합	300mm/연결관100mm	개소	4,856
하수관천공및접합	300mm/연결관150mm	개소	7,332
하수관천공및접합	450mm/연결관100mm	개소	5,313
하수연결단지관연결	100	개소	4,736
하수연결단지관연결	200	개소	10,129
맨홀설치		개소	979,289

○ 계약기간 : 2016.07.11 ~ 2017.06.30

○ 도급비 내역 : 553,735,920원

○ 계약업체 : ㈜상명건설    대표 김학진

나. 심의회 개최

○ 심의일정 : 2017. 1. 19(목) 14:00

○ 심의장소 : 급수운영과

○ 심의위원장 : 급수운영과장

○ 심의의원 : 시설6급 이승완, 시설7급 김재영, 시설7급 박상권, 시설7급 이한수

다. 심의내용

○ 신규공종 및 계약물량 증․감에 대한 설계변경 사항

- 물량변동의 적정성 여부

- 계약 변동(증․감) 물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부

- 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

○ 위 사항을 검토 및 심의하고 심의 결과에 의거 설계변경 조치

따로붙임 :  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 심의신청서 1부.

3. 설계변경내역서 1부. 끝.

주무관	최용진		급수운영과장	01/19 장종욱
협조자	★주무관	김재영		주무관	이한수		주무관	박상권
주무관	代김종필토
시행	급수운영과-1490	(		)	접수		(		)
우	01137		/
전화	02-3146-3342	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(7)